계약금액조정 검토결과서

건 명	2019년 등촌1동외 8개동 상수도공사			요청기관(부서)		강서수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2020. 5. 18.		공사개요	- D=15~300㎜, L=1,122m
공사기간	2019. 6. 19. ~ 2020. 6. 30.			도 급 자		수봉산업개발(주) 대표 이경호
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
548,546	567,710	증)19,164		증)19,164	증)12,410		감)6,754
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 계획 보고(시설관리과-9292, 2020.5.18.) - 본부장 방침 『2019년 하반기 녹에 취약한 노후 상수도관 정비 계획』에 의거 노후 상수도관 정비를 위한 시공 물량 증가 - 보험료, 퇴직공제부금비 등 실비 정산
검토내용	○ 조정 내역 - 주철직관부설공 80~150㎜ 주,야 : 인력 → 기계 - 주철(이형관)부설공 80~150㎜ 주,야 : 인력 → 기계 - 주철관철거공 80~150㎜ 주,야 : 인력 → 기계 - 제수밸브 부설 및 접합공 80~150㎜ 주,야 : 인력 → 기계 - 제수밸브 철거공 80~150㎜ 주,야 : 인력 → 기계 - 보조기층재 소운반 2.5DT : 3.4㎥ → 11.3㎥ - 혼합골재 40㎜이하 : 35.0㎥ → 11.7㎥							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 퇴직공제부금비, 환경보전비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람.