계약금액조정 검토결과서

건 명	2019년 2차 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사		요청기관 (부서)	남부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2020. 6. 1.		공사개요	- 아스팔트 포장 49.16a - 콘크리트 포장 0.89a 보도블록 포장 12.44a
공사기간	2019.1.16. ~ 2020.6.30.		도 급 자	태령건설(주) 대표 정권우
심사요청(천원)			심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감	심사대상	검 토	증 감
582,475	640,409	증)57,934	57,934	57,934	-
구 분	검 토 결 과					비 고
변경사유	○ 설계변경(제2회-최종) 검토 보고(급수운영과-8624, 2020.6.1.) - 공사시행 중 현장 시공여건 변화 및 공사의 특수성으로 자재 및 물량 변동으로 인한 증액
검토내용	○ 원안시행					조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 없음
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람