계약금액조정 검토결과서

건 명	토목구조물(여과수조 및 수처리 관로시설) 설치공사		요청기관 (부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자	2020. 12. 16.		공사개요	토목구조물 설치
공사기간	2020.10.13. ~ 2020.12.31.		도 급 자	(주)예인아테크 대표 오관석
심사요청(천원)			심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감	심사대상	검 토	증 감
102,595	135,830	증)33,235	증)33,235	증)30,560	감)2,675
구 분	검 토 결 과					비 고
변경사유	○ 설계변경 보고(정수시설과-12767, 2020.12.15.) - 시공물량 증감 및 신규공종(우수관 및 우수맨홀 부설 등) 발생
검토내용	○ 단가 조정 - 에폭시 도막방수 : 규격에 따른 공종 분리, 시방서와 재료수량 일치 - 가림막 휀스 설치철거 : 노무비와 경비 중복으로 노무비 삭제 - 산업안전보건관리비 : 사용내역에 따른 실정산 ○ 물량 조정 - 플랜지 접합(500mm) :「제수밸브 부설 및 접합」공종과 중복으로 물량 삭제					조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 준공 전 퇴직공제부금비, 환경보전비의 증빙서류 확인철저 후 정산시행
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람