계약금액조정 검토결과서

건 명	2020년 광암정수센터 토목건축시설물 유지보수공사			요청기관(부서)		광암아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자	2021. 3. 22.		공사개요	- 토목 건축 시설물 유지보수
공사기간	2020. 3. 16. ~ 2021. 3. 31.			도 급 자		한샘건설(주) 대표 김동률
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
178,200	190,816	증)12,616		증)12,616	증)12,320		감)296
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경(최종) 및 계약금액 조정 시행 보고(정수시설과-2832, 2021.3.22.) - 방충망 설치 등 시공 중 수량 증감 및 신규공종 발생 - 보험료 및 퇴직공제부금비 등 실비정산
검토내용	○ 조정 내역 - 토공 수량 일치 ·잔토처리(인력, 현장처리) 14㎥ 추가 - 사급자재 래미콘(25-21-12) 11.88㎥ 삭제 ※ 무근콘크리트타설 재료비에 기포함							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람