계약금액조정 검토결과서

건 명	2020-1년 용산구 관내 상수도공사			요청기관(부서)		중부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2021. 8. 20.		공사개요	- D=15~300㎜, L=638m
공사기간	2021. 3. 31. ~ 2021. 8. 31.			도 급 자		루시이엔씨(주) 대표 강성현
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
257,969	259,300	증)1,331		증)1,331	감)1,017		감)2,348
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경(2차,최종) 시행 보고(급수운영과-15954, 2021.8.20.) - 최근 3년 평균물량으로 설계되어 시공 중 물량 증감 사항 발생 - 보험료, 퇴직공제부금비 등 실비 정산
검토내용	○ 제경비 조정 - 건설하도급발급수수료 삭제 - 환경보전비 삭제 - 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 삭제							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람