계약금액조정 검토결과서

건 명	2022년-1 중구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)			요청기관(부서)		중부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2023.5.10.		공사개요	D=15~300mm, L=904m
공사기간	2022.10.24. ~ 2023.6.30.			도 급 자		성지이엔지(주) 대표 정용훈
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
942,428	1,036,453	증)94,025		증)94,025	증)93,988		감)37
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 중구 관내 상수도공사 설계변경 계획(안), 3차 (급수운영과-8515, 2023.5.10.) - 시공물량 증·감 및 신규공정,신규자재 발생에 따른 계약물량 조정
검토내용	○ 부단수천공 분기점분기(400×연결관 25~30mm) · 배관공(수도) 0.4인 → 0.38인 · 보통인부 0.21인 → 0.20인 ○ 작업차량비 보온재 및 뚜껑운반(야간) 단산 수식 정정 · Q=3.16㎥/hr → 5.31㎥/hr
기타사항	○ 보험료, 산업안전보건관리비, 퇴직공제부금 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 관련 규정에 맞게 처리하기 바랍니다.
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람.