계약금액조정 검토결과서

건 명	2023년 반포동 외 2개동 장기사용 배급수관 정비공사			요청기관(부서)		강남수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2023.12.13.		공사개요	장기사용 상수도관 교체공사 (D=20~800mm, L=2,615m)
공사기간	2023.5.22. ~ 2024.5.28.			도 급 자		㈜원화건설 대표 박준상
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
1,276,865	1,571,865	증)295,000		증)295,000	증)294,265		감) 735
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 계약금액 조정
검토내용	○ 스테인리스 절단공 단가 오류 정정 ○ 아스팔트 포장절단 물량 등 시공 수량 조정(※ 담당자 확인)
기타사항	○ 추후 보험료, 산업안전보건관리비, 주휴수당 등 기타 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 관련 규정에 맞게 처리하기 바랍니다.
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람.