계약금액조정 검토결과서

건 명	2023년-1 창신1동 등 10개동 상수도공사			요청기관(부서)		중부수도사업소 (시설관리과)
접수일자	2024.3.21.		공사개요	D15~300mm, L=897m
공사기간	2023.9.14. ~ 2024.6.30.			도 급 자		㈜임현건설 대표 임창준
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
898,516	978,835	증)80,319		증)80,319	증)80,319		감) -
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 종로구 관내 상수도공사 설계변경(최종) 계획(안) (시설관리과-5981, 2024.3.13.) - 신공종, 자재 발생 및 현장여건에 따른 공사중 물량 증,감
검토내용	○ 원안시행
기타사항	○ 추후 보험료 등 기타 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 관련 규정에 맞게 처리하기 바랍니다.
검토의견	○ 원안시행