문서번호	설계관리팀-595			★담당자	팀장			건설안전본부장
보존기간	년								05/31
				***	***			***
결재일자	2023.05.31.
공개여부	공개
				협 조
					P/L		***
				감 사	감사실		***
『가락시장 수산동 대체 냉동창고 건립공사 설계용역』
계약기간 변경 계획(안)

2023. 5.

	서울특별시농수산식품공사
설계관리팀

가락시장 수산동 대체 냉동창고 건립공사 설계용역

계약기간 변경 계획(안)

수산동 대체 냉동창고 건립공사 설계용역 과업인 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가가 진행됨에 있어 유관기관 의견(송파구청, 5건)을 반영코자 계약기간을 변경하고자 함

Ⅰ		계약 현황

계 약 명 : 가락시장 수산동 대체 냉동창고 건립공사 설계용역

계약기간 : ′23. 1. 2. ~ ′23. 5. 31.(150일)

계약금액 : ***

계약상대자 : ***

Ⅱ		그 동안 추진 경과

′22.12.29.: 용역 계약(′23.1.2. 용역 착수)

′23. 1.20.: 냉동창고 평면계획 수립(수산 유통인 설명회)

○ 사업규모(연면적) 변경 : 당초(1,750㎡) → 변경(2,333㎡)_(증583㎡)

- 사유 : 수산유통인 요구사항에 의한 사업규모 변경

′23. 3.06.: 서울시 경관(건축)전문위원회 경관심의 접수

′23. 3.22.: 서울시 경관(건축)전문위원회 경관심의 _ [조건부(보고) 의결]

※ ′23. 4.19.: 서울시 경관(건축)전문위원회 경관심의 조건사항 _ [보고 완료]

′23. 4.14.: 도시계획시설사업 실시계획인가 신청(서울시)

′23. 4.24.: 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가 관련부서 의견 조회(송파구청외 5개 기관)

′23. 5.18.: 실시설계도면 및 공사비 내역서 제출(1차)

′23. 5.26.: 용역 과업수행 계약기간 변경 요청(설계사 → 공사)

Ⅲ		계약기간 변경 검토

관련근거

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제9장 계약 일반조건(계약기간의 연장)

- 제7절1-다.4) 그밖에 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

변경사유

○ 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가 관련부서 의견(송파구청 5건)에 대한 협의 등 행정소요기간을 감안하여 계약기간 연장(증12일)

- 도시계획시설사업 실시계획(변경)인가 (6월2주차 예정)

계약기간 변경 : 증12일

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	′23. 1.2. ~ ′23. 5.31.	′23. 1.2. ~ ′23.6.12.	증12일
계약금액	***	***	변경없음

Ⅳ		행정 조치 사항

계약변경 요청(설계관리팀 → 재무팀)

붙임  1. 합의서 …………………… 1부

2. 일상감사 요청서 ……… 1부.  끝.

[결재의견 페이지]