(재)서울디자인재단

N

대표이사방침 제(870)호

수신

재무팀

(경유)

제목

계약변경 의뢰_서울라이트 프로젝터 함체 7기 제작·설치 전기공사 계약 변경

1. 「서울라이트 함체 제작·설치공사 계획(수정)」(시설팀-3301, 23.07.21.)과 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 전기공사 기간 연장이 필요하여 아래와 같이 계약기간 변경을 요청드립니다.

계약건명	서울라이트 프로젝터 함체 7기 제작·설치 전기공사
계약종류	공사	용역		물품
계약상대	업체 (대표자)		주식회사 동하이엔씨 (이종수)
	사업자번호 (법인등록번호)		570-88-02316 (**************)
	주소		서울특별시 도봉구 마들로 724, 비08호(도봉동, 도봉한양수자인)
	연락처		02-3494-6054, dongha6054@naver.com
소요예산	계약금액		140,508,130원
근거규정	[지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준] 제9장 제8절 계약이행의 지체와 계약의 해제. 해지 제2의 계약기간의 연장 가항 1-다 8)를 근거로 함
계약기간	2023. 08. 24. ~ 2023. 11. 30.
변경기간	2023. 08. 24. ~ 2024. 2. 29.
계약방법	2인이상 견적(전자공개) 수의계약 (제한경쟁-면허, 지역(서울시))
노무관리	비대상
하자증권	대상
예산과목	수탁사업, DDP시설개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼, DDP시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 서울라이트 함체 제작·설치공사 계획(수정) 1부.

2. 계약 체결_서울라이트 프로젝터 함체 7기 제작·설치 전기공사 1부.

3. 공사계약서_DDP 서울라이트 프로젝터 함체 7기 제작·설치 전기공사 1부.

4. 계약변경 합의각서 1부.  끝.

시설팀
선임						11/30 홍성엽			시설팀장				11/30 이재만		DDP운영본부장						11/30 박진배		대표이사				11/30
																											이경돈
협조자			책임					11/30 한라경
시행		시설팀-5576 (2023.11.30.)														접수
우	03098						서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6) 서울디자인지원센터 7-9층																		/
전화번호				02-2153-0024													/	james@seouldesign.or.kr							/	부분공개(5,7)