계약심사 처리 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

의 뢰 부 서	도 로 시설과	접수 일자	2016.12.15		통보 일자	2016.12.16	접수 번호
감 사 실시자	직 명 : 시설6급 성 명 : 왕 태 현
건 명	2016년 도로굴착복구공사(설계변경)
추 진 개 요				심 사 결 과
□ 공사개요 ○ 공사명 : 2016년 도로굴착복구공사 (설계변경) ○ 공사기간 : 2016.3.11. ~ 12. 31. ○ 설계변경 금액(도급액) - 당 초 : 456,685,860원 - 변 경 : 542,270,000원 - 증 감 : 85,584,140원 ○ 공사규모 - 아스팔트포장 157@, 보도블럭 및 판석 포장 18.94@ ○ 설계변경 사유 - 신규비목 및 수량 변경				□ 심사결과 ○ 요청금액 : 85,584,140원(설계변경 증액분) ○ 심사금액 : 85,584,140원 ○ 조 정 액 : - ※ 관급비, 이전비는 심사 제외 □ 심사내용 ○ 신규비목 및 수량 변경에 따른 설계 변경으로 단가 산출이 적정함. □ 기타의견 ○ 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 경우 자체 반영하시기 바람.