계약심사 조정내역 및 사유서

[마포석유비축기지 주차장 공원화사업]

□ 사업 개요

○ 공사위치 : 마포구 성산동661

○ 공사규모 : 임시주차장 35,212㎡, 접근로 3,300㎡

광장 및 조경시설, 안내시설 , 공중화장실

○ 총공사비 : 4,129백만원

□ 부지 현황

□ 심사평가 결과 : 절감액 406,075백만원 (12.1%)

[천원]

구 분	요청금액(도급비)	심사금액(도급비)	절 감 액	절감률
계	3,347,554	2,941,479	406,075	12.1%
조경	1,453,766	1,334,253	119,513	8.22%
토목	1,046,812	791,897	254,915	24.3%
건축	846,976	815,329	31,647	3.7%

계약심사 조정내역 및 사유서 (조경)

□ 공 사 명 : 마포석유비축기지 주차장 공원화공사

□ 사업개요

위 치	마포구 성산동 661번지
공사개요	수목식재, 목재데크 설치, 조경시설물 설치, 보도포장 등
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액  : 1,453,766천원

◦ 심사금액  : 1,334,253천원

◦ 절 감 액  :   119,513천원

◦ 절 감 률  :         8.22%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정 : 미송 등 4종

- 시중물가지 조사단가 적용

○ 일위대가조정

- 목재데크B : 건축슬라브위로 불필요한 줄기초 제외(감25,270천원)

- 데크콘크리트 : 기계소형비빔타설→레미콘타설품 적용(감16,823천원)

- 험프경계석 : 정원석놓기품→경계석 설치품 적용(감1,038천원)

□ 관급자재비는 심사 제외

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 마포석유비축기지 재생 및 공원화사업(토목분야)

□ 사업개요

위 치	마포구 석유비축기지(구)
공사개요	흄관(D450~600) 350m, PC암거(2.0×2.0) 71m U형측구 192m, 원형수로관 159m 등
공사기간	착공일로 부터 15월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :  1,046,812천원

◦ 심사결과 :    791,897천원

◦ 절 감 액 :    252,915천원

◦ 절 감 률 :       24.35%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 경  유 : 997.0원/L → 1,085.2원/L(3월 서울기준)

- 휴발유 : 1,205원/L → 1,295.1원/L(3월 서울기준)

- PVC 이중벽관(D400) : 640,170원/m→64,170원/m 등

◦ 일위대가 조정

- 녹막이 페인트칠 품 조정(품셈건축17-4)

- 콘크리트 포장(t=20cm, 레미콘) 품 조정 (품셈토목10-3-2)

- 주차장 융차식 차선도색 품 조정 (품셈토목 10-6-20)

□ 그 밖의 사항

◦ 관급자재비 및 이설비 등은 심사 제외(별도 검토 후 시행)

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 마포석유비축기지 주차장 공원화공사(건축)

□ 사업개요

위 치	마포구 성산동 661번지
공사개요	- 공사개요 · 규 모 : 지상1층, 연면적 750㎡ · 구 조 : 철골/철근콘크리트조 · 용 도 : 안내시설 및 조형파고라
공사기간	착공일로부터 15개월

□ 심사평가 결과

○ 설계금액	846,976	천원
○ 심사금액	814,333	천원
○ 절 감 액	32,643	천원
○ 절 감 율	3.9	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 (스텐강관 등 3개 품목 )

- 시중물가지 → 조달청가격정보 단가적용 : 스텐강관(9,030원/m → 6,510원/m)

◦ 일위대가 조정

- 조립식 가설울타리 :  공사기간에 대한 손율적용(12개월)  △1,340천원

- 화강석붙임(바닥) : 품셈적용 →  서울형 품셈 적용(석재판 바닥붙임)  △1,943천원

- 철골가공조립 : 철골공수 × 작업난이도 0.9% 적용  △1,016천원

- 외부 내후성강판 설치  : 견적적용 →  타 공사 심사 가격 적용   △5,560천원