계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 개화역 환승센터 태양광 발전소

□ 사업개요

위 치	강서구 개화동 664 (개화동로8길19)
공사개요	태양광발전설비 184.32kW 설치
공사기간	2018. 10 ~ 2018. 12

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	429,220천원
◦ 심사금액 :	421,454천원
◦ 절 감 액 :	7,766천원
◦ 절 감 률 :	1.8%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 스트롱앵커 등 4개(조달청 단가 등)

- 스트롱앵커(3/8) : 150원/개 → 100원/개

- 행거볼트(M10×1000㎜): 921원/개 → 798원/개

◦ 일위대가 조정 : 스트롱앵커 설치 등 17개 공종

- 스트롱앵커(3/8) 설치품 정정 : 내선전공(0.08인 → 0.036인)

- 풀박스(100×100×75㎜) 설치시 서울형품셈 적용

· 내선전공(0.17인 → 0.15인)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음