계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건    명 : 노원마을미디어지원센터 신축공사(기계설비)

□ 사업개용

위 치	노원구 상계동 194-28
개 요	○ 기계설비공사 - 전기온수기 등 장비설치, 위생도기설치, 옥외배관, 오배수배관, 급수급탕배관, 환기닥트설치, 소방기구, 엘리베이터설치 등
기 간	2017. 10 ~2018. 4

□ 심사결과 총괄표 – 관급자재, 시설분담금 심사제외

◦ 설계금액  : 111,170천원

◦ 심사금액  : 106,310천원

◦ 절 감 액  :      4,860천원

◦ 절 감 률  :     4.37%

□ 주요 조정내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 행어볼트 등 42종

- 행어로드(D9)/m  : 870원 → 520원 (감 350원)

- 전기저장식온수기(15 Liter x 1.5kW)/대 : 321,500원 → 252,000원(감 69,500원)

◦ 일위대가조정 : 배기팬 등 2종 조정

- 배기팬(D420) : 덕트공 1.613인→1.313인, 보통인부 0.479인→ 0.39인

◦ 표준시장단가 적용공정  → 표준품셈 적용 (100억원 미만 공사)

- 게이트밸브(Φ40mm×0.98MPa, 청동) 외 14종