계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 목3동 기부채납공원 지하주차장 건설공사(소방) - 기계소방

□ 공사개요

위 치	서울특별시 양천구 목3동 631-1번지 일대(목1주택재건축 사업부지 내)
개 요	○ 기계소방공사 - 장비설치, 스프링클러배관, 동파방지열선, 소화내진 등
기 간	착공일로부터 9개월

□ 심사결과

[단위: 천원]

구 분	요 청 금 액	심 사 금 액	절 감 액	절 감 율
합 계	350,757	335,838	14,919	4.25%
기계소방	227,788	220,425	7,363	3.23%
전기소방	122,969	115,413	7,556	6.1%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 다단볼류트펌프(22kW) 등 37종

- 다단볼류트펌프(22kW): 5,712천원 → 4,155천원, 감 1,557천원/대

- 웨스코펌프(3.7kW): 1,865천원 → 1,040천원, 감 825천원/대

○ 일위대가 조정: 밸브보온(D200×25T) 등 10종

- 밸브보온(D200×25T)/개: 보온공 0.379인, 덕트공 1.306인 → 보온공, 특별인부 0.275인

- 여과망(D200)/개: 일반밸브 및 콕류 설치 → 수격방지기 설치 적용

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음

계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 목3동 기부채납공원 지하주차장 건설 전기소방공사

□ 사업개요

위 치	양천구 목3동 631-1번지 일대 (목1주택재건축 사업부지 내)
공사개요	자동화재탐지설비 1식, 유도등설비 1식, 기타
공사기간	착공일로부터 9개월

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	122,969천원
◦ 심사금액 :	115,413천원
◦ 절 감 액 :	7,556천원
◦ 절 감 률 :	6.1%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 피난구유도등 외 1종

- 피난구유도등(중형, 단면, 60분) : 150천원/개 → 57천원/개

◦ 일위대가 조정 : 절연전선 설치 외 2개 공종

- 절연전선(HFIX 1.38㎜) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공 : 0.01인 → 내선전공 : 0.008인)

◦ 산업안전보건관리비 요율 조정

- 1.85%(특수 및 기타) → 2.93%(일반건설-갑)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음