주요 심사 내용

□ 공 사 명 : 봉천천복개 보수공사

□ 사업개요

위 치	관악구 봉천동 1665-6(원당초교)~동작구 신대방동 459-5
공사개요	- 포장보수공 42.06a, 방수공 4,206㎡ 신축이음보수 153m, 기타 보수공 1식
공사기간	2018. 4. ~ 2018. 11.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	546,828	천원
◦	심사금액	:	535,610	천원
◦	절 감 액	:	11,218	천원
◦	절 감 률	:	2.05	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 융착식 도료 (황색) : 1,910kg/원 → 1,623kg/원 등 4종조정

◦ 내역서 및 일위대가

- 교면방수바탕처리 : 야간할증 중복 0.875 → 0.5(서울형품셈)

- 철근콘크리트깨기 : 잡재료비 조정

- 콘테이너형가설사무실,창고설치 : 크레인 시간조정 2 → 1(표준품셈 토목2-2-3)

- 싸인보드 주간,야간 대가조정

- 방수층보호재설치 : 방수공 0.012 → 0.01(표준품셈 건축 12-2-1)

- 침투형강화프라이머도포: 도장공 0.013 → 0.011, 보통인부 0.003→ 0.005, 공구손료 추가 2%

- 로드콘m40보수몰탈충진: 기구손료 제외 (표준품셈 건축 15-1-2)

- 아스팔트포장절단: 인력품 조정, 동력분무기 추가, 기구손료제외(표준품셈 토목 10-4-2)

- 포장장비 운반비 : 유류산정 적재,적하시간조정(표준품셈 9-1)

- 잡재료비,공구손료 : 경비 → 재료비 조정 등

◦ 제비율조정

- 산업안전보건관리비 : 1.86%+5,349천원 → 2.93% x 1.2

- 일반관리비 : 5.5% → 6%

□ 그 밖의 사항

◦ ‘방수재 가열 및 용융’ 공종은 원가산출 기준이 없어 심사에서 제외 함

참고로, 방수재 가열 및 용융(5톤 cooker)’부분은 설계서인 공사시방서에 상세하게 표기하여 추후 실사 후 정산이 가능하도록 조치후 발주 필요

◦ 원가심사에 따른 설계도서, 물량 등 재확인

◦ 관급자재비, 이설비 및 기타 심사 제외