계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 용산동 2가 5-28번지 앵커시설 건립공사 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	서울특별시 용산구 용산동 2가 5-28번지
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 난방배관, 위생배관, 환기설비, 가스배관 등
기 간	2017. 11. ~ 2018. 4.

□ 심사결과 – 시설분담금 심사제외

○ 설계금액  :  126,127천원

○ 심사금액  :  124,067천원

○ 절 감 액  :      2,060천원

○ 절 감 률  :        1.63%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 세면기손잡이(장애자용) 등 31종

- 세면기손잡이(장애자용): 136,000원 → 97,700원, 감 38,300원/개

- 고무발포보온재(동관용, D12×13T): 1,000원 → 787원, 감 213원/미터

○ 일위대가 조정: 조합페인트칠(2회) 등 21종

- 조합페인트칠(2회)/㎡: 도장공 0.046인 → 0.04인, 보통인부 0인 → 0.008인

- 동력분무기(4.85kW)/시간: 휘발유 소모량 1.3리터 → 7.5리터