계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 동부간선로 언더패스 CCTV설비 설치공사

□ 사업개요

위 치	동부간선로 중랑교, 월릉교, 월계1교 양방향 언더패스
공사개요	CCTV 설치공사 1식, 통합관제시스템 설치공사 1식 등
공사기간	계약일로부터 2019. 4. 30

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	550,550천원
◦ 심사금액:	384,362천원
◦ 절 감 액:	166,188천원
◦ 절 감 률:	30.2%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 전선관 외 1종(조달청단가)

전선관(아연도 22C): 2,350원/m → 1,989원/m

◦ 일위대가 조정: 광케이블 접속시험외 4개 공종

광케이블 접속시험 설치비 정정

·광케이블설치사 3.84인, 특별인부 3.84인 → 광케이블설치사 2.88인, 특별인부 2.88인

모니터링 워크스테이션 설치비 정정

·통신설비공 0.33인, H/W시험사 0.5인 → 통신설비공 0.2인, 보통인부 0.16인

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음