계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2017년 생활권 공원녹지 조성사업 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	서울특별시 노원구 상계동 441-3번지 일대
개 요	○ 기계설비공사 - 옥외배관, 급수배관, 소화기구설치, 동파방지열선설치
기 간	2018. 5. ~ 2018. 11.

□ 심사결과 – 시설분담금 심사 제외

○ 설계금액  :  10,175천원

○ 심사금액  :    9,617천원

○ 절 감 액  :        558천원

○ 절 감 률  :       5.48%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 고무발포보온재(강관용, D25×13T) 등 6종

- 고무발포보온재(강관용, D25×13T): 2,013원 → 1,673원, 감 340원/m

- 용접봉(D3.2, CS-200): 2,836원 → 2,023원, 감 813원/㎏

○ 일위대가 조정: 강판용접(3㎜) 등 3종

- 강판용접(3㎜)/m: 용접공 0.03인 → 0.036인, 특별인부 0.009인 → 0.011인

- 열선 설치/m: 플랜트전공 0.043인 → 기계설비공 0.017인, 보통인부 0.006인

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음