계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2018년 폐아스콘 운반 및 처리용역-1구역

□ 사업개요

위 치	성동도로사업소 관리도로(성동구, 광진구, 동대문구, 중랑구)
공사개요	-폐아스콘 운반 및 처리 20,446톤
공사기간	착공일 ~ 2018.12.31.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	468,000	천원
◦	심사금액	:	467,000	천원
◦	절 감 액	:	1,000	천원
◦	절 감 률	:	0.2	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 내역서 및 일위대가

- 운반(DT24톤) : t3(적하시간) 0.8(보통) → 0.5(양호) (품셈8-10)

□ 그 밖의 사항

◦ 운반비 산정의 기준이 되는 다음 사항을 설계서(도면, 과업내용서, 물량내역서, 현장설명서)에 구체적으로 명기하여 불가피한 경우를 제외하고는 계약체결 후 운반거리 변경이 발생하지 않도록 하여야 함.

- 운반경로를 과업내용서에 운반거리, 운반로, 운반속도 등을 표기하여 용역발주