계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사

□ 공사개요

위 치	한강공원 내 야외수영장 5개소 및 물놀이장 2개소
개 요	○ 여과장치, 기계·전기장치, 기타장치 등 보수 - 여과기 분해조립, 샤워기 설치 및 분해 정리 등
기 간	2018. 3. ~ 2018. 9.

□ 심사결과

○ 설계금액  :  727,940천원

○ 심사금액  :  701,538천원

○ 절 감 액  :     26,402천원

○ 절 감 률  :        3.63%

□ 주요 심사내용

○ 자재단가 조정: 탄소강관(D80) 등 34종

- 탄소강관(D80): 11,330원 → 8,309원, 감 3,021원/m

○ 일위대가 조정: 수영풀 급수노즐 교체 등 21종

- 수영풀 급수노즐 교체/개: 배관공 0.05인 → 0.04인, 서울형품셈 적용

○ 경비항목 조정: 산재보험료 등 5종

- 산재보험료: 노무비의 3.9% → 4.05%, 2018년도 기준 적용

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음