계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 창작연극 지원센터 건립 통신공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 성북구 동소문동1가 1-4번지 외 1필지
공사개요	통합배선설비공사 1식, CATV 설비공사 1식, 방송설비공사 1식, CCTV 설비공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2020. 8.~2022. 12.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	1,134,408천 원
◦ 심사금액:	1,067,036천 원
◦ 절 감 액:	67,372천 원
◦ 절 감 률:	5.9%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 행어볼트 외 18종(조달청단가 적용)

행어볼트(Φ9×1000㎟): 1,160원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 스피커 설치 외 21개 공종

스피커(10W, 컬럼형) 설치 품 조정

(내선전공: 0.33인/개 → 내선전공: 0.192인/개)

절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공: 0.01인/m → 내선전공: 0.008인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음