계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 노들섬 특화공간 조성 전기공사(설계변경 2회)

□ 사업개요

위 치	서울시 용산구 양녕로 445
공사개요	수배전설비공사 1식, 조명등 설치공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2017. 11. 06. ~ 2019. 10. 20.

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	423,951천원
◦ 심사금액 :	420,070천원
◦ 절 감 액 :	3,881천원
◦ 절 감 률 :	0.9%

□ 주요 심사내용

◦ 일위대가 조정 : 케이블트레이 설치 외 3개 공종

- 케이블트레이(W200×100H×2.3t) 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.23인/m → 0.23인/m)

- 케이블(STP cat.5e 4P) 설치 품 조정

(저압케이블전공: 0.026인/m → 0.015인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음