계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명 : 구룡터널 조명설비 교체공사

□ 사업개요

위 치	언주로(구룡터널 양방향)
공사개요	조명기구 설치공사, 디밍제어설치공사, 케이블 설치공사 등
공사기간	계약일로부터 90일

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액:	1,095,006천원
◦ 심사금액:	1,089,645천원
◦ 절 감 액:	5,361천원
◦ 절 감 률:	0.5%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 케이블 외 6개(조달단가 등)

- 케이블(FCV 2.5㎟ 2C) : 1,326원/m → 1,310원/m

- 전선관(28㎜) :  3,147원/m → 2,656원/m

◦ 일위대가 조정 : 케이블트레이 지지대 설치 공종

- 절연바켓트럭 조종원 건설기계운전사 → 화물차운전사로 정정

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음