계약심사 조정내역 및 사유서

□ 사업명: 2020년 군자차량기지 등 40개소 신호전원장치(UPS) 제작․구매 설치

□ 사업개요

위 치	2호선 군자차량기지 등 3개소, 3호선 지축차량기지 등 9개소, 4호선 노원역 등 7개소, 6호선 신내차량기지 등 21개소
사업개요	무정전전원장치(UPS) 제작 설치․개량 1식
사업기간	계약일로부터 230일

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	1,624,211천원
◦ 심사금액:	1,546,352천원
◦ 절 감 액:	77,859천원
◦ 절 감 률:	4.8%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정: 무정전전원장치 외 9종(시중거래가격 등 적용)

무정전전원장치(1상 10KVA): 21,500천원/대 → 20,500천원/대

◦ 야간 작업시간 제한 할증 조정

작업시간 제한 할증(역사): 30% → 23.3%

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음