계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공사명: 아동복지센터 전기시설 개선공사

□ 사업개요

위 치	강남구 광평로34길 124 (수서동 산 4-1외 4필지)
공사개요	노후 전기시설 교체공사 1식, 보안등 교체공사 1식, 기타공사 1식
공사기간	2020. 5.~ 2021. 7.

□ 심사평가 결과

◦ 요청금액:	251,046천원
◦ 심사금액:	249,393천원
◦ 절 감 액:	1,653천원
◦ 절 감 률:	0.7%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정:행어볼트 외 1종(조달청단가 등 적용)

행어볼트(M10×1000㎜): 1,160원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 케이블트레이 철거 외 5개 공종

케이블트레이(W200×H100) 철거 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.115인/m → 내선전공: 0.1인/m)

현장교통정리원은 “노무비”에서 “경비” 항목으로 조정

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음