계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 전시공간 조성 전기공사

□ 사업개요

위 치	서울특별시 종로구 율곡로 3길 4 (구 풍문여고 부지)
공사개요	전등공사 1식, 전열공사 1식 등
공사기간	착수일로부터 ~ ’21. 4월까지

□ 심사평가 결과

◦ 설계금액 :	991,730천원
◦ 심사금액 :	939,180천원
◦ 절 감 액 :	52,550천원
◦ 절 감 률 :	5.3%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 행거볼트 등 4개(조달청 단가 등)

- 행거볼트(M10×1000㎜) : 921원/개 → 900원/개

- 6각너트(M10) : 22원/개 → 18원/개

◦ 일위대가 조정 : 파이프행거 설치 등 10개 공종

- 파이프행거 설치 품 조정

(내선전공: 0.054인/개소 → 내선전공: 0.036인/개소)

- 절연전선(HFIX 2.5㎟) 설치 품 조정

(내선전공: 0.009인/m → 내선전공: 0.008인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 이견 없음