계약 사항 변경 사유서

■ 용 역 명 : 불광천 차집관거 단면 보수공사(사각) 시공감리용역

■ 용역기간 : 2018.8.7  ~ 2018.11.4

■ 계약금액 : ￦30,908,000원(금삼천구십만팔천원정)

■ 변경 내용

구 분	당 초	변 경	증, 감
용역기간	2018.8.7~2018.11.4	2018.8.7~2018.12.23	증 49일
금 액	30,908,000원	46,300,000원	증 15,392,000원

■ 변경 사유

당초 용역기간이 사업기간(2018.7.23~2018.12.23)보다 부족하    게 책정되었고, 또한 사업구간이 총연장 344m이었으나, 사업구    간이 140m 추가되어 원할한 사업관리를 위하여 용역기간 연장    이 불가피한 실정임.

■  상기와 같기에 용역기간을 사업기간에 맞추어 2018.12.23까지    연장하고 이에 따라 증가되는 용역비는 추후 정산에 반영함이 가    하다고 사료됩니다.