서울특별시고시 제2014-   호

도시계획시설(도로·광장)사업 실시계획 변경고시

1. 서울특별시고시 제2006-101호(2006.3.23)로 도시계획시설(도로·광장) 결정(변경)되고, 강서구고시 제2007-2호(2007.1.2)로 도시계획시설(도로·광장) 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2013-652호(2013.4.25.)로 실시계획인가 열람공고하고 서울특별시고시 제2013-433호(2013.12.19)로 도시계획시설(도로·광장)사업 실시계획 변경 고시한『방화대교 남단 접속도로 건설공사』에 대하여

2. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제88조 및 같은법시행령 제97조에 따라 도시계획시설(도로·광장)사업 실시계획을 변경 작성하고, 같은법 제91조 및 같은법시행령 제100조의 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2014년  4월   일

서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치 : 강서구 방화동 개화산 입구~올림픽대로간

나. 사업의 종류 및 명칭

○ 사업의 종류 : 도시계획시설(도로·광장)사업

○ 사업의 명칭 : 방화대교 남단 접속도로 건설공사

다. 사업의 규모

○ 도로개설 : 3,021m, B=5.75m~19.2m

- 토공도로 : L=1,316m

- 터    널 : L=949m(분리형 495m, 454m, 3차로)

- 교    량 : L=756m(1~3차로 B=5.75m~19.2m)

라. 사업시행자의 주소, 성명

○ 주 소 : 서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문별관 2동 3층

○ 성 명 : 서울특별시장(서울특별시 도시기반시설본부장)

마. 사업기간

○ 당  초 : 착수일로부터 ~ 2014. 07. 31

○ 변  경 : 착수일로부터 ~ 2014. 12. 31

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과

소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 별첨조서

사. 변경사유(내용) : 공사기간 연장, 일부 도로폭원 변경으로 편입토지 증가 (증4,564.2㎡)

아. 기타 자세한 사항은 서울특별시 도시기반시설본부 토목부(☎02-3708- 2566)로 문의하시기 바랍니다.