◈ 서울특별시고시 제2018-   호

서울 상암택지개발지구 개발계획 및 실시계획 변경승인 고시

1. 서울특별시 고시 제2016-403호(2016.12.15.)에 의거 개발계획 및 실시계획 변경승인(34차) 고시된 서울 상암택지개발지구에 대하여 택지개발촉진법 제8조, 제9조 규정에 의거 개발계획 및 실시계획 변경 고시합니다.

2. 관계도서는 서울특별시 주택건축국 임대주택과(☎ 2133-7081) 및 서울특별시 서울주택도시공사 택지사업본부 택지계획부(☎ 3410-7595)에서 각각 열람할 수 있습니다.

2018년 3월 22일

서 울 특 별 시 장

【 주요 변경내용 】

■ 개발계획 및 실시계획 변경

(1) 6,7공구 개발기간 변경

구 분	사 업 준 공 일
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구
기 정	2012.06.30 (사업준공)	2006.12.31 (사업준공)	2010.01.31 (사업준공)	2011.12.31 (사업준공)	2012.06.30 (사업준공)	2017.12.31	2017.12.31
변 경						2018.12.31	2018.12.31

※ 변경사유

- 6공구내 문화시설(박정희기념관) 관련 계획변경 기간 부족

- 국․공유지 수용협의 지연에 따른 사업기간 부족

(2) 수용할 토지 등 소재지, 지번 및 지목, 소유권 및 소유권이외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소 변경

- 상암동 1170-6 외 13필지

※ 변경사유 : 지적변경사항 최신화

(3) 무상귀속 대상토지 변경

- 상암동 527-36 외 12필지

※ 변경사유 : 무상귀속 협의사항 반영

(4) 공공시설 등 처분계획서 변경

- 무상귀속 조서 및 대체 공공시설 조서 변경

※ 변경사유 : 공공시설에 대하여 개발계획 및 실시계획의 시설결정사항 반영

서울 상암택지개발지구 개발계획 및 실시계획 변경승인

Ⅰ. 택지개발사업 개발계획

1. 사업의 명칭 : 변경없음

◦ 서울 상암지구 택지개발사업

2. 사업시행자의 명칭 및 주소와 대표자의 성명 : 변경없음

(1) 사업시행자 명칭 : 서울특별시

(2) 주      소 : 서울특별시 중구 세종대로 110

(3) 대표자 성명 : 서울특별시장 박원순

3. 개발계획의 개요 : 변경없음

가. 개발 목적 : 변경없음

(1) 정부의 장‧단기 주택건설 정책에 부응

(2) 서민주택 건설에 필요한 택지의 효율적 공급

(3) 서울 대도시권 서북부지역 부도심 형성

(4) 계획적이고 합리적인 개발로 체계적인 도시 성장에 기여

(5) 경제적인 택지공급과 쾌적한 주거환경 조성

나. 수용인구 및 주택에 관한 계획(변경없음) : 생략

다. 집단에너지 공급에 관한 계획(변경없음) : 생략

라. 교통에 관한 계획(변경없음) : 생략

마. 대상토지의 단계별 조성에 관한 계획(변경없음) : 생략

바. 연차별 자금투자 및 재원조달에 관한 계획(변경없음) : 생략

4. 개발기간(변경)

가. 사업 착수일 : 1998년 6월 11일

나. 사업 준공일(변경)

구 분	사 업 준 공 일
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구
기 정	2012.06.30 (사업준공)	2006.12.31 (사업준공)	2010.01.31 (사업준공)	2011.12.31 (사업준공)	2012.06.30 (사업준공)	2017.12.31	2017.12.31
변 경						2018.12.31	2018.12.31

5. 토지이용에 관한 계획(변경없음) : 생략

6. 개발하고자 하는 토지의 위치와 면적(변경없음) : 생략

7. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 소유권 및 소유권 이외의 권리명세와 그 소유자 및 권리자의 성명․주소(변경)

가. 토지조서(변경분)

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		관계인			비고
					공부	편입	성명	주소	성명	주소	권리내용
1	기정	상암동	1170-6	대	415	415	서울특별시
	변경	상암동	1170-6	대	414	414	서울교통공사
2	기정	상암동	1170-7	대	45	45	서울특별시
	변경	상암동	1170-7	대	45	45	서울교통공사
3	추가	상암동	1170-13	대	1	1	서울교통공사
4	기정	상암동	1171-5	답	376	376	허필주	송파 잠실 44 A 426-308
	변경	상암동	1171-5	답	481	481	서울교통공사
5	기정	상암동	1171-8	답	61	61	서울특별시
	변경	상암동	1171-8	답	61	61	서울교통공사
6	기정	상암동	1171-9	답	65	65	서울특별시
	변경	상암동	1171-9	답	65	65	서울교통공사
7	기정	상암동	1185-1	답	18	18	서울특별시
	변경	상암동	1185-1	답	33	33	서울교통공사
8	기정	성산동	421-25	답	7	7	서울특별시
	변경	성산동	421-25	답	7	7	서울교통공사
9	기정	성산동	421-26	답	29	29	서울특별시
	변경	성산동	421-26	답	29	29	서울교통공사
10	기정	성산동	477-5	전	10	10	서울특별시
	변경	성산동	477-5	전	10	10	서울교통공사
11	기정	성산동	478-5	전	26	26	서울특별시
	변경	성산동	478-5	전	26	26	서울교통공사
12	기정	성산동	496-4	대	96	96	서울특별시	(미등기)
	변경	성산동	496-4	대	96	96	(국)	(미등기)
13	기정	성산동	514-9	전	216	216	서울특별시
	변경	성산동	514-9	전	216	216	서울특별시 마포구
14	기정	성산동	527-36	도	38	38	서울특별시
	변경	성산동	527-36	도	38	38	국 (국토교통부)

8. 개발계획평면도(Scale = 1/5,000)(변경없음) : 생략

9. 상기 1~8항외 변경사항 없음.

Ⅱ. 택지개발사업 실시계획 변경

1. 사업의 목적(변경없음) : 생략

2. 사업시행지(변경없음) : 생략

3. 사업의 종류 및 명칭(변경없음) : 생략

4. 사업시행자의 명칭, 주소 및 대표자 성명(변경없음) : 생략

5. 사업시행기간(변경)

가. 사업시행기간

◦ 사 업 착 수 일 : 실시계획 승인일

◦ 사 업 준 공 일(변경)

구 분	사 업 준 공 일
	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구
기 정	2012.06.30 (사업준공)	2006.12.31 (사업준공)	2010.01.31 (사업준공)	2011.12.31 (사업준공)	2012.06.30 (사업준공)	2017.12.31	2017.12.31
변 경						2018.12.31	2018.12.31

나. 공종별 소요기간(변경없음) : 생략

6. 자금계획서(변경없음) : 생략

7. 사업의 개요(변경없음) : 생략

8. 사업시행방법(변경없음) : 생략

9. 토지 등의 매입 및 보상계획서(변경없음) : 생략

10. 이해 관계인에 대한 서류의 공시송달 방법(변경없음) : 생략

11. 조성된 토지 및 공공시설물의 관리처분 계획(변경없음) : 생략

12. 법 제25조의 규정에 의한 공공시설 등의 명세서 및 처분계획서(변경) : 별첨

13. 수용 또는 사용할 토지등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리 명세서와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소를 기재한 서류(변경)

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		관계인			비고
					공부	편입	성명	주소	성명	주소	권리내용
1	기정	상암동	1170-6	대	415	415	서울특별시
	변경	상암동	1170-6	대	414	414	서울교통공사
2	기정	상암동	1170-7	대	45	45	서울특별시
	변경	상암동	1170-7	대	45	45	서울교통공사
3	추가	상암동	1170-13	대	1	1	서울교통공사
4	기정	상암동	1171-5	답	376	376	허필주	송파 잠실 44 A 426-308
	변경	상암동	1171-5	답	481	481	서울교통공사

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		관계인			비고
					공부	편입	성명	주소	성명	주소	권리내용
5	기정	상암동	1171-8	답	61	61	서울특별시
	변경	상암동	1171-8	답	61	61	서울교통공사
6	기정	상암동	1171-9	답	65	65	서울특별시
	변경	상암동	1171-9	답	65	65	서울교통공사
7	기정	상암동	1185-1	답	18	18	서울특별시
	변경	상암동	1185-1	답	33	33	서울교통공사
8	기정	성산동	421-25	답	7	7	서울특별시
	변경	성산동	421-25	답	7	7	서울교통공사
9	기정	성산동	421-26	답	29	29	서울특별시
	변경	성산동	421-26	답	29	29	서울교통공사
10	기정	성산동	477-5	전	10	10	서울특별시
	변경	성산동	477-5	전	10	10	서울교통공사
11	기정	성산동	478-5	전	26	26	서울특별시
	변경	성산동	478-5	전	26	26	서울교통공사
12	기정	성산동	496-4	대	96	96	서울특별시	(미등기)
	변경	성산동	496-4	대	96	96	(국)	(미등기)
13	기정	성산동	514-9	전	216	216	서울특별시
	변경	성산동	514-9	전	216	216	서울특별시 마포구
14	기정	성산동	527-36	도	38	38	서울특별시
	변경	성산동	527-36	도	38	38	국 (국토교통부)

14. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시관리계획 및 제1종지구단위계획에 관한 사항(변경없음) : 생략

15. 사업시행지의 위치도(변경없음) : 생략

16. 사업시행지의 지적도 (Scale = 1/1,200)(변경없음) : 생략

17. 실시계획 평면도 (Scale = 1/5,000)(변경없음) : 생략

18. 상기 1~17항외 변경사항 없음.

Ⅲ. 법 제25조의 규정에 의한 공공시설 등의 명세서 및 처분계획서

1. 무상귀속 및 대체에 관한 공공시설물 및 토지 등의 총괄조서(변경)

가. 무상귀속토지 총괄조서(변경분)

○ 소관청별 총괄조서(7공구)(변경)

구분			합계	대	전	답	임	잡	도	구	천
합계	필지수	증) 8		증) 1	증) 2	증) 5
	면적	증) 679		-	증) 36	증) 643
국(건교부)	필지수	증) 1							증) 1
	면적	증) 38							증) 38
서울 특별시	필지수	감) 5		감) 2	감) 1	감) 1			감) 1
	면적	감) 747		감) 460	감) 216	감) 33			감) 38
마포구	필지수	증) 1			증) 1
	면적	증) 216			증) 216
서울교통공사	필지수	증) 11		증) 3	증) 2	증) 6
	면적	증) 1,172		증) 460	증) 36	증) 676

※ 측량결과 현실이용 상태가 공공시설임

나. 대체시설토지 총괄조서(변경)

구분		폭원	시설수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	비고
기정	도로	6~50m	53	15,739	426,7117.3	버스정차대포함
	철도시설	-	1	-	1,455.0
	광장	-	4	-	8,716.0
	공원	-	6	-	182,259.3
	녹지	-	45	-	91,909.2
	공동구	-	1	2,468	500	도로지하에 매설
	상수도시설	-	-	18,370	-	도로지하에 매설
	하수도시설	-	-	31,428	오수펌프장 :3,215
변경	도로	2~50m	56	17,504.7	459,389.7	버스정차대포함
	철도시설	-	2	-	1,662.7
	광장	-	2	-	2,863.5
	공원	-	10	-	185,257.1
	녹지	-	41	-	75,503.1
	공동구	-	1	2,468	512.6
	상수도시설	-	-	18,370	-	도로지하에 매설
	하수도시설	-	-	31,428	오수펌프장 :3,123	도로지하에 매설
	하천	-	1	-	1,257.0
	문화시설	-	1	-	11,099.1	박정희 기념도서관

2. 대체시설을 시행할 자 및 시행방법(변경)

◦ 시행할 자 : (기정) 서울특별시장  오 세 훈

(변경) 서울특별시장  박 원 순

◦ 시행방법 : 택지개발촉진법에 의한 택지개발사업으로 시행

3. 대체시설을 관리할 자(변경)

◦ (기정) 서울특별시장, 마포구청장

◦ (변경) 서울특별시장, 마포구청장, 서울교통공사장

4. 무상귀속 및 대체 공공시설의 조서(변경)

가. 사업시행자 귀속분조서(변경분)

(1) 7공구(변경분)

■ 국(국토교통부)

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)			관리청	실제이용상황				비고
									공공시설			공공 시설외
					공부	편입	무상귀속
									도로	구거	하천
1	기정	성산동	527-36	도	38	38	38	서울특별시	38	-	-	-
	변경	성산동	527-36	도	38	38	38	국 (국토교통부)	38	-	-	-
소 계					38	38	38		38	-	-	-

■ 서울시 마포구

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)			관리청	실제이용상황				비고
									공공시설			공공 시설외
					공부	편입	무상귀속
									도로	구거	하천
1	기정	성산동	514-9	전	216	216	216	서울특별시	216	-	-	-
	변경	성산동	514-9	전	216	216	216	서울특별시 마포구	216	-	-	-
소 계					216	216	216		216	-	-	-

■ 서울교통공사

번호	구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)			관리청	실제이용상황				비고
									공공시설			공공 시설외
					공부	편입	무상귀속
									도로	구거	철도
1	기정	상암동	1170-6	대	415	415	415	서울특별시	415	-	-	-
	변경	상암동	1170-6	대	414	414	414	서울교통 공사	-	-	414	-
2	기정	상암동	1170-7	대	45	45	45	서울특별시	45	-	-	-
	변경	상암동	1170-7	대	45	45	45	서울교통 공사	-	-	45	-
3	추가	상암동	1170-13	답	1	1	1	서울교통 공사			1	-	신규
4	추가	상암동	1171-5	답	481	481	481	서울교통 공사	-	-	481	-	신규
5	추가	상암동	1171-8	답	61	61	61	서울교통 공사	-	-	61	-	신규
6	추가	상암동	1171-9	답	65	65	65	서울교통 공사	-	-	65	-	신규
7	기정	상암동	1185-1	답	33	33	33	서울특별시	33	-	-	-
	변경	상암동	1185-1	답	33	33	33	서울교통 공사	-	-	33	-
8	추가	성산동	421-25	답	7	7	7	서울교통 공사	-	-	7	-	신규
9	추가	성산동	421-26	답	29	29	29	서울교통 공사	-	-	29	-	신규
10	추가	성산동	477-5	전	10	10	10	서울교통 공사	-	-	10	-	신규
11	추가	성산동	478-5	전	26	26	26	서울교통 공사	-	-	26	-	신규
소계					1,172	1,172	1,172				1,172

나. 지방자치단체 귀속분조서(변경)

(1) 도로(변경)

(가) 도로계획 총괄

(기정)

구 분		폭원 (m)	계			1공구			2공구			3공구			4공구			5공구
			노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
총계			53(3)	17,232	462,717.3	12	4,756	168,778.0	6(1)	862	15,921.7	10	2,381	50,025.0	23(2)	7,360	210,108.0	2	678	17,884.6
소계			1	1,838	100,314.5	1	1,838	100,284.0	-	-	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
광로	2류	50	1	1,838	100,314.5	1	1,838	100,284.0	-	-	30.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소 계			8(3)	7,424	222,167.8	3	1,810	50,728.0	(1)	-	2,244.0	-	-	-	4(2)	3,961	152,230.0	1	458	16,965.8
대로	1류	35	1	1,195	51,320.0			-			-			-	1	1,195	51,320.0			-
	2류	30	1	1,032	34,142.0	1	1,032	34,142.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3류	25	6(3)	5,197	136,705.8	2	778	16,586.0	(1)	-	2,244.0	-	-	-	3(2)	3,961	100,910.0	1	458	16,965.8
소계			19	5,305	111,694.0	5	954	16,740.0	1	489	10,388.0	4	1,875	45,756.0	9	1,987"	38,810.0	-	-	-
중로	1류	20	10	3,474	82,305.0	1	257	5,400.0	1	489	10,388.0	4	1,875	45,756.0	4	853	20,761.0	-	-	-
	2류	15	9	1,831	29,389.0	4	697	11,340.0	-	-	-	-	-	-	5	1,134	18,049.0	-	-	-
	3류	12	-	-	-
소계			11	1,091	7,839.2	3	154	1,026.0	2	114	714.4	3	383	3,580.0	2	220	1,600.0	1	220	918.8
소류	1류	10	-	-	-
	2류	8	4	498	4,529.0	-	-	-	-	-	-	3	383	3,580.0	1	115	949.0	-	-	-
	3류	8미만	7	593	3,310.2	3	154	1,026.0	2	114	714.4	-	-	-	1	105	651.0	1	220	918.8
소계			14	1,574	20,701.8	-	-	-	3	259	2,544.8	3	123	689.0	8	1,192	17,468.0	-	-	-
보행자 도로	중로1류	20	2	352	7,492.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	352	7,492.0	-	-	-
	중로2류	15	1	297	4,601.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	297	4,601.0	-	-	-
	소로1류	10	5	721	7,406.3	-	-	-	1	242	2,426.3	-	-	-	4	479	4,980.0	-	-	-
	소로2류	8	1	16	113.3	-	-	-	1	16	113.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소로3류	8미만	5	188	1,089.2	-	-	-	1	1	5.2	3	123	689.0	1	64	395.0	-	-	-
가감속차선 버스 정차대 가각전제

※ ( )안의 숫자는 1개노선의 공구별 중복 산정값임.

(변경)

구 분			폭원 (m)	계			1공구			2공구			3공구			4공구			5공구			6공구			7공구
				노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
총 계			-	56 (9)	17,504.7	459,389.7	10	3,680.0	148,339.3	6(2)	1,030.2	15,921.7	11 (3)	2,387.0	44,855.3	25 (2)	8,578.5	204,181.3	1	678.0	17,472.1	1	99.0	908.0	1(2)	1,052.0	27,712.0
광로	소계		-	1(1)	1,838.0	97,268.6	1	1,838.0	96,827.2	(1)	-	30.5	(1)	-	410.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1류		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2류		50	1(1)	1,838.0	97,268.6	1	1,838.0	96,827.2	(1)	-	30.5	(1)	-	410.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3류		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	소계		-	8(8)	7,592.2	228,558.5	2	758.0	33,977.6	(2)	168.2	2,244.0	(2)	-	202.7	4(2)	5,156.0	147,842.6	1	458.0	16,579.6	-	-	-	1(2)	1,052.0	27,712.0
	1류		30	1(1)	1,195.0	49,616.5	-	-	-	-	-	-	(1)	-	80.0	1	1,195.0	49,536.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2류		25	1(1)	1,032.0	44,229.1	1	744.0	32,773.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	288.0	11,455.2
	3류		25 ~35	6(6)	5,365.2	134,712.9	1	14.0	1,203.7	(2)	168.2	2,244.0	(1)	-	122.7	3(2)	3,961.0	98,306.1	1	458.0	16,579.6	-	-	-	1(1)	764.0	16,256.8
중로	소계		-	19	5,305.0	104,747.0	5	954.0	16,508.8	1	489.0	10,388.0	4	1,875.0	40,266.4	9	1,987.0	37,583.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1류		15	10	3,474.0	75,706.7	1	257.0	5,406.1	1	489.0	10,388.0	4	1,875.0	40,266.4	4	853.0	19,646.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2류		12	9	1,831.0	29,040.3	4	697.0	11,102.7	-	-	-	-	-	-	5	1,134.0	17,937.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3류		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	소계		-	9	847.0	6,806.8	2	130.0	1,025.7	2	114.0	714.4	2	284.0	2,365.9	2	220.0	1,792.8	-	-	-	1	99.0	908.0	-	-	-
	1류		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2류		8	4	498.0	4,455.6	-	-	-	-	-	-	2	284.0	2,365.9	1	115.0	1,181.7	-	-	-	1	99.0	908.0	-	-	-
	3류		8 미만	5	349.0	2,351.2	2	130.0	1,025.7	2	114.0	714.4	-	-	-	1	105.0	611.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보행자전용도로	소계		-	19	1,922.5	22,008.8	-	-	-	3	259.0	2,544.8	3	228.0	1,609.4	10	1,215.5	16,962.1	1	220.0	892.5	-	-	-	-	-	-
	중로	1류	15	2	352.0	7,242.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	352.0	7,242.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2류	10	1	297.0	4,456.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	297.0	4,456.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소로	1류	8	5	721.0	7,243.4	-	-	-	1	242.0	2,426.3	-	-	-	4	479.0	4,817.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2류	8 미만	1	16.0	113.3	-	-	-	1	16.0	113.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3류	-	10	536.5	2,953.4	-	-	-	1	1.0	5.2	5	228.0	1,609.4	3	87.5	446.3	1	220.0	892.5	-	-	-	-	-	-

주) ( )안의 숫자는 1개노선의 공구별 중복 산정값임

(나) 도로조서

(기정)

규 모				사용 형태	기 능	기 점	종 점	연장(m)	면적 (㎡)	1공구		2공구		3공구		4공구		5공구		비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)							연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)
광로	2	93	50	일반 도로	주간선 도로	성산동 537-4	고양시덕은동 269	2,498 (1,838)	100,284.0	(1,838)	100,284.0
대로	1	1	35	일반 도로	보조간선도로	상암동 129-2 (대로 3-30)	수색동 (대로 3-32)	1,195	51,320.0							1,195	51,320.0
대로	2	20	30	일반 도로	주간선 도로	성산동 53-26 (광로 2-93)	불광동 (대로 2-12)	6,723 (1,032)	34,142.0	(1,032)	34,142.0
대로	3	30	25～ 35	일반 도로	보조간선도로	성산동 (대로 3-187)	상암동 129-2 (대로 1-1)	3,250 (138)	6,971.1	(138)	4,978		1,993.1							사업 지구 내확폭
대로	3	32	30	일반 도로	주간선 도로	상암동	은평구 수색동 (수색로)	2,175 (937)	24,700.8							(479)	7,735	(458)	16,965.8
대로	3	1	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 1167-2 (중로1-126)	수색동 (대로 3-32)	1,970	47,454.0	640	11,608					1,330	35,846
대로	3	2	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 56 (광로2-93)	상암동 1-3 (대로3-1)	944	24,498.9				250.9			944	24,248.0
대로	3	3	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 405 (광로2-93)	상암동 229-13 (대로3-1)	940	24,948.0							940	24,948.0
대로	3	4	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 302-3 (대로1-1)	상암동 292-1 (대로3-1)	268	8,133.0							268	8,133.0
중로	1	401	20	일반 도로	집산 도로	상암동 1186 (대로3-1)	상암동 27-49 (대로3-30)	257	5,400.0	257	5,400.0
중로	1	1	20	일반 도로	집산 도로	상암동 73 (대로3-2)	상암동 산6 (대로3-30)	489	10,388.0			489	10,388.0
중로	1	2	20	일반 도로	집산 도로	상암동 98 (대로3-2)	상암동 876 (대로3-3)	164	4,610.0							164	4,610.0
중로	1	3	20	일반 도로	집산 도로	상암동 172-4 (대로1-1)	상암동 251-10 (대로3-1)	298	7,508.0							298	7,508.0
중로	1	4	20	일반 도로	집산 도로	상암동 85-2 (대로3-3)	상암동 445-1 (중로1-6)	1,089	25,458.0					1,089	25,458.0
중로	1	5	20	일반 도로	집산 도로	상암동 360-4 (중로1-4)	상암동 301 (대로1-1)	89	3,273.0					89	3,273.0
중로	1	6	20	일반 도로	집산 도로	상암동 1542-1 (광로2-93)	상암동 446 (대로3-32)	607	14,474.0					607	14,474.0
중로	1	7	20	일반 도로	집산 도로	상암동 383-1 (중로1-4)	상암동 374-3 (대로1-1)	90	2,551.0					90	2,551.0
중로	1	8	20	일반도로	집산 도로	상암동 296답	상암동 292-3 (대로3-4)	297	6,213.0							297	6,213.0
중로	1	9	20	일반 도로	집산 도로	상암동 291 (대로 3-4)	상암동 258-1 (중로1-3)	297	6,213.0							297	6,213.0
중로	1	10	20	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 244-4 (중로1-3)	상암동 220 (대로3-3)	278	5,863.0							278	5,863.0			자전거도로 포함
중로	1	11	20	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 218 (대로3-3)	상암동 202-6 (중로2-6)	74	1,629.0							74	1,629.0			자전거도로 포함
중로	2	404	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1251 (중로 1-126)	상암동 1271 (중로 1-401)	250	4,023.0	250	4,023.0
중로	2	405	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1188 (중로 1-126)	상암동 1271 (중로 2-404)	79	1,324.0	79	1,324.0
중로	2	406	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1183 (중로 1-401)	상암동 1178 (중로 2-407)	89	1,505.0	89	1,505.0
중로	2	407	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1153 (중로 1-126)	성산동 495 (중로 1-401)	279	4,488.0	279	4,488.0
중로	2	1	15	일반 도로	집산 도로	상암동 산14-8 (중로1-2)	상암동 136-4 (중로2-2)	202	3,194.0							202	3,194.0
중로	2	2	15	일반 도로	집산 도로	상암동 170-3 (대로3-3)	상암동 산11-1 (대로3-2)	164	2,609.0							164	2,609.0
중로	2	3	15	일반 도로	집산 도로	상암동 369 (대로1-1)	상암동 251-13 (대로3-1)	265	4,236.0							265	4,236.0
중로	2	4	15	일반 도로	집산 도로	상암동 368-2 (대로1-1)	상암동 262 (대로3-1)	253	4,062.0							253	4,062.0
중로	2	5	15	일반 도로	집산 도로	상암동 304 (대로1-1)	상암동 308-3 (대로3-1)	250	3,948.0							250	3,948.0
중로	2	6	15	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 202-4 (대로1-1)	상암동 9-10 (대로3-1)	297	4,601.0							297	4,601.0			자전거도로 포함

규 모				사용 형태	기 능	기 점	종 점	연장(m)	면적 (㎡)	1공구		2공구		3공구		4공구		5공구		비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)							연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)	연장(m)	면적 (㎡)
소로	1	1	10	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 112-3 (중로1-1)	상암동 산12-3 (대로3-2)	242	2,426.3			242	2,426.3							자전거도로 포함
소로	1	2	10	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 산11-4 (중로2-1)	상암동 산12-3 (대로3-2)	80	825.0							80	825.0			자전거도로 포함
소로	1	3	10	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 138-1 (대로3-3)	상암동 136-9 (중로2-1)	75	777.0							75	777.0			자전거도로 포함
소로	1	4	10	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 193 (대로1-1)	상암동 187 (중로1-11)	177	1,846.0							177	1,846.0			자전거도로 포함
소로	1	5	10	특수 도로	보행자 전용도로	상암동 187 (중로1-11)	상암동 234-7 (대로3-1)	147	1,532.0							147	1,532.0			자전거도로 포함
소로	2	1	8	일반 도로	국지 도로	상암동 11-21 (대로3-2)	상암동 1385-8	115	949.0							115	949.0
소로	2	2	8	일반 도로	국지 도로	상암동 394 (중로1-4)	상암동 산21	99	908.0					99	908.0
소로	2	3	8	일반 도로	국지 도로	상암동 334 (중로1-4)	상암동 357-1 (중로1-4)	134	1,274.0					134	1,274.0
소로	2	4	8	일반 도로	국지 도로	상암동 431-1 (중로1-6)	상암동 448 (중로1-6)	150	1,398.0					150	1,398.0
소로	2	5	8	특수 도로	보행자 전용 도로	상암동 6-1 (중로1-1)	상암동 34-37	16	113.3			16	113.3
소로	3	1	6～10	일반 도로	국지 도로	상암동 1533 (중로1-401상암동1280-1)	상암동 1258 (중로2-404상암동1285-1)	369 (110)	803.0	(110)	803
소로	3	2	6	일반 도로	국지 도로	상암동 24-9 (대3-30)	상암동 24-8	20	124.0	20	124
소로	3	3	4	일반 도로	국지 도로	상암동 28-170	상암동 28-171	24	99.0	24	99.0
소로	3	4	6	특수 도로	보행자 전용 도로	상암동 34-58	상암동 34-7	1	5.2			1	5.2
소로	3	5	6	일반 도로	국지 도로	상암동 37-15 (대3-30)	상암동 37-27	42	259.6			42	259.6
소로	3	6	6	일반 도로	국지 도로	상암동 115-7 (대3-30)	상암동 115-5	72	454.8			72	454.8
소로	3	7	4	특수 도로	보행자 전용 도로	상암동 357-1 (중로1-4)	상암동 357 (소로2-3)	42	187.0					42	187.0
소로	3	8	4	특수 도로	보행자 전용 도로	상암동 335-2 (소로2-3)	상암동 335-2	21						21	93.0
소로	3	9	6	특수 도로	보행자 전용 도로	상암동 431-1 (중로1-6)	상암동 451-2	60	409.0					60	409.0
소로	3	10	6	특수 도로	보행자 전용 도로	상암동 136-6 (중로2-2)	상암동 136-1 (대로1-1)	64	395.0							64	395.0
소로	3	11	4	일반 도로	국지 도로	상암동 672-1	상암동 695	220	918.8									220	918.8
소로	3	12	6	일반 도로	국지 도로	상암동 134-7	상암동 8-17	105	651.0							105	651.0

주) (   )는 사업지구내 구간임

(변경)

규모				사용 형태	기 능	기 점	종 점	연장 (m)	면적 (㎡)	1공구		2공구		3공구		4공구		5공구		6공구		7공구		비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)							연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)
광로	2	93	50	일반 도로	주간선 도로	성산동 537-4	고양시덕은동 269	2,498 (1,838)	97,268.6	(1,838)	96,827.2	-	30.5	-	410.9	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	1	1	35	일반 도로	보조간선도로	상암동 129-2 (대로 3-30)	수색동 (대로 3-32)	1,195	49,616.5	-	-	-	-	-	80.0	1,195	49,536.5	-	-	-	-	-	-
대로	2	20	30	일반 도로	주간선 도로	성산동 53-26 (광로 2-93)	불광동 (대로 2-12)	6,723 (1,032)	44,229.1	(744)	32,773.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(288)	11,455.2
대로	3	30	25 ~ 35	일반 도로	보조간선도로	성산동 (대로 3-187)	상암동 129-2 (대로 1-1)	3,250 (306.2)	7,774.6	(14)	1,203.7	(168.2)	1,993.1	-	-	-	-	-	-	-	-	(124)	4,577.8
대로	3	32	30	일반 도로	주간선 도로	상암동	은평구 수색동 (수색로)	2,175 (937)	24,590.6	-	-	-	-	-	-	(479)	8,011.0	(458)	16,579.6	-	-	-	-
대로	3	1	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 1167-2 (중로1-126)	수색동 (대로 3-32)	1,970	46,376.4	-	-	-	-	-	-	1,330	34,697.4	-	-	-	-	640	11,679.0
대로	3	2	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 56 (광로2-93)	상암동 1-3 (대로3-1)	944	23,843.4	-	-	-	250.9	-	-	944	23,592.5	-	-	-	-	-	-
대로	3	3	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 405 (광로2-93)	상암동 229-13 (대로3-1)	940	24,261.9	-	-	-	-	-	122.7	940	24,139.2	-	-	-	-	-	-
대로	3	4	25	일반 도로	보조간선도로	상암동 302-3 (대로1-1)	상암동 292-1 (대로3-1)	268	7,866.0	-	-	-	-	-	-	268	7,866.0	-	-	-	-	-	-
중로	1	401	20	일반 도로	집산 도로	상암동 1186 (대로3-1)	상암동 27-49 (대로3-30)	257	5,406.1	257	5,406.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	1	20	일반 도로	집산 도로	상암동 73 (대로3-2)	상암동 산6 (대로3-30)	489	10,388.0	-	-	489	10,388.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	2	20	일반 도로	집산 도로	상암동 98 (대로3-2)	상암동 876 (대로3-3)	164	4,494.2	-	-	-	-	-	-	164	4,494.2	-	-	-	-	-	-
중로	1	3	20	일반 도로	집산 도로	상암동 172-4 (대로1-1)	상암동 251-10 (대로3-1)	298	7,264.1	-	-	-	-	-	-	298	7,264.1	-	-	-	-	-	-
중로	1	4	20	일반 도로	집산 도로	상암동 85-2 (대로3-3)	상암동 445-1 (중로1-6)	1,089	22,597.9	-	-	-	-	1,089	22,597.9	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	5	20	일반 도로	집산 도로	상암동 360-4 (중로1-4)	상암동 301 (대로1-1)	89	2,859.3	-	-	-	-	89	2,859.3	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	6	20	일반 도로	집산 도로	상암동 1542-1 (광로2-93)	상암동 446 (대로3-32)	607	12,564.6	-	-	-	-	607	12,564.6	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	7	20	일반 도로	집산 도로	상암동 383-1 (중로1-4)	상암동 374-3 (대로1-1)	90	2,244.6	-	-	-	-	90	2,244.6	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	1	8	20	일반 도로	집산 도로	상암동 296답	상암동 292-3 (대로3-4)	94	2,354.5	-	-	-	-	-	-	94	2,354.5	-	-	-	-	-	-
중로	1	9	20	일반 도로	집산 도로	상암동 291 (대로 3-4)	상암동 258-1 (중로1-3)	297	5,533.4	-	-	-	-	-	-	297	5,533.4	-	-	-	-	-	-
중로	1	10	20	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 244-4 (중로1-3)	상암동 220 (대로3-3)	278	5,673.8	-	-	-	-	-	-	278	5,673.8	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
중로	1	11	20	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 218 (대로3-3)	상암동 202-6 (중로2-6)	74	1,568.9	-	-	-	-	-	-	74	1,568.9	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
중로	2	404	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1251 (중로 1-126)	상암동 1271 (중로 1-401)	250	4,127.5	250	4,127.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	2	405	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1188 (중로 1-126)	상암동 1271 (중로 2-404)	79	1,243.8	79	1,243.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규모				사용 형태	기 능	기 점	종 점	연장 (m)	면적 (㎡)	1공구		2공구		3공구		4공구		5공구		6공구		7공구		비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)							연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)	연장 (m)	면적 (㎡)
중로	2	406	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1183 (중로 1-401)	상암동 1178 (중로 2-407)	89	1428.2	89	1428.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	2	407	15	일반 도로	집산 도로	상암동 1153 (중로 1-126)	성산동 495 (중로 1-401)	279	4,303.2	279	4,303.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	2	1	15	일반 도로	집산 도로	상암동 산14-8 (중로 1-2)	상암동 136-4 (중로 2-2)	202	3,084.3	-	-	-	-	-	-	202	3,084.3	-	-	-	-	-	-
중로	2	2	15	일반 도로	집산 도로	상암동 170-3 (대로 3-3)	상암동 산11-1 (대로 3-2)	164	2,523.6	-	-	-	-	-	-	164	2,523.6	-	-	-	-	-	-
중로	2	3	15	일반 도로	집산 도로	상암동 369 (대로1-1)	상암동 251-13 (대로3-1)	265	4,337.5	-	-	-	-	-	-	265	4,337.5	-	-	-	-	-	-
중로	2	4	15	일반 도로	집산 도로	상암동 368-2 (대로 1-1)	상암동 251-45 (대로 3-1)	253	4,170.3	-	-	-	-	-	-	253	4,170.3	-	-	-	-	-	-
중로	2	5	15	일반 도로	집산 도로	상암동 304 (대로 1-1)	상암동 308-3 (대로 3-1)	250	3,821.9	-	-	-	-	-	-	250	3,821.9	-	-	-	-	-	-
중로	2	6	15	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 202-4 (대로 1-1)	상암동 9-10 (대로 3-1)	297	4,456	-	-	-	-	-	-	297	4,456.0	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
소로	1	1	10	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 112-3 (중로 1-1)	상암동 산12-3 (대로 3-2)	242	2,426.3	-	-	242	2,426.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
소로	1	2	10	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 산11-4 (중로 2-1)	상암동 산12-3 (대로 3-2)	80	797.3	-	-	-	-	-	-	80	797.3	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
소로	1	3	10	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 138-1 (대로 3-3)	상암동 136-9 (중로 2-1)	75	749.0	-	-	-	-	-	-	75	749.0	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
소로	1	4	10	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 193 (대로 1-1)	상암동 187 (중로 1-11)	177	1,786.2	-	-	-	-	-	-	177	1,786.2	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
소로	1	5	10	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 187 (중로 1-11)	상암동 234-7 (대로 3-1)	147	1,484.6	-	-	-	-	-	-	147	1,484.6	-	-	-	-	-	-	자전거 도로 포함
소로	2	1	8	일반 도로	국지 도로	상암동 11-21 (대로 3-2)	상암동 1385-8	115	1,181.7	-	-	-	-	-	-	115	1,181.7	-	-	-	-	-	-
소로	2	2	8	일반 도로	국지 도로	상암동 394 (중로 1-4)	상암동 산21	99	908.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	908.0	-	-
소로	2	3	8	일반 도로	국지 도로	상암동 334 (중로1-4)	상암동 357-1 (중로1-4)	134	1,127.0	-	-	-	-	134	1,127.0	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	2	4	8	일반 도로	국지 도로	상암동 431-1 (중로1-6)	상암동 448 (중로1-6)	150	1,238.9	-	-	-	-	150	1,238.9	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	2	5	8	보행자 전용 도로	특수 도로	상암동 6-1 (중로1-1)	상암동 34-37	16	113.3	-	-	16	113.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	3	1	6 ~ 10	일반 도로	국지 도로	상암동 1533 (중로1-401상암동1280-1)	상암동 1258 (중로2-404상암동1285-1)	369 (110)	903.3	(110)	903.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	3	2	6	일반 도로	국지 도로	상암동 24-9 (대3-30)	상암동 24-8	20	122.4	20	122.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	3	4	6	보행자 전용도로	특수 도로	상암동 34-58	상암동 34-7	1	5.2	-	-	1	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 광장계획(변경)

구 분		위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비 고
계	기정		8,716	2,920	-	-	5,796	-
	변경		2,863.5	468.6	-	-	-	-	-	2,394.9
1	기정	상암동 1178-2 일원	2,457	2,457	-	-	-	-	-	-
	변경	상암동 1178-2 일원	2,394.9	-	-	-	-	-	-	2,394.9
2	기정	상암동 24-12대 일원	463	463	-	-	-	-	-	-
	변경	상암동 24-12대 일원	468.6	468.6	-	-	-	-	-	-
3	기정	상암동 9-30대 일원	3,140	-	-	-	3,140	-			폐지
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	기정	상암동 9-15대 일원	2,656	-	-	-	2,656	-			폐지
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 공원 및 녹지시설계획(변경)

◦ 공원(변경)

구 분			위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
계		기정	-	182,259.3	2,902	1,511.3	163,444	14,402	-	-	-
		변경	-	185,257.1	2,896.8	1,511.3	3,026.5	28,572.3	-	149,250.2	-
근린공원	소계	기정	-	174,824	-	-	160,422	14,402	-	-	-
		변경	-	163,536.7	-	-	-	14,286.5	-	149,250.2	-
	1	기정	상암동 산21임 일원	160,422	-	-	160,422	-	-	-	-
		변경	상암동 산21임 일원	149,250.2	-	-	-	-	-	149,250.2	-
	2	기정	상암동 313-3답 일원	14,402	-	-	-	14,402	-	-	-
		변경	상암동 313-3답 일원	14,286.5	-	-	-	14,286.5	-	-	-
어린이공원	소계	기정	-	7,435.3	2,902	1,511.3	3,022	-	-	-	-
		변경	-	7,434.6	2,896.8	1,511.3	3,026.5	-	-	-	-
	1	기정	상암동 1282 대 일원	2,902	2,902	-	-	-	-	-	-
		변경		2,896.8	2,896.8	-	-	-	-	-	-
	2	변경없음	상암동 114-1전 일원	1,511.3	-	1,511.3	-	-	-	-	-
	3	기정	상암동 154-5대 일원	1,519	-	-	1,519	-	-
		변경		1,522.2	-	-	1,522.2	-	-	-	-	-
	4	기정	상암동 462-2전 일원	1,503	-	-	1,503	-	-
		변경		1,504.3	-	-	1,504.3	-	-	-	-	-
문화공원	소계	추가	-	14,285.8	-	-	-	14,285.8	-	-	-	신규
	1	추가	상암동 260-2답 일원	4,630.7	-	-	-	4,630.7	-	-	-	신규
	2	추가	상암동 203-4답 일원	3,828.6	-	-	-	3,828.6	-	-	-	신규
	3	추가	상암동 260-2답 일원	3,154.7	-	-	-	3,154.7	-	-	-	신규
	4	추가	상암동 260-2답 일원	2,671.8	-	-	-	2,671.8	-	-	-	신규

◦ 녹지(변경)

구 분			위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
총계		기정		91,908.2	20,102	18,697.2	16,067	35,868	1,174
		변경		75,503.1	15,250.5	18,697.2	12,209.0	20,210.4	4,252.5	-	4,883.5
경관 녹 지	소계	기정		45,740	15,180	11,355	1,652	16,379	1,174
		변경		29,856.2	15,250.5	11,355.0	461.3	1,669.9	1,119.5	-	-
	1	기정	상암동 산4-185 임 일원	15,180	15,180	-	-	-	-
		변경	상암동 산4-185 임 일원	15,250.5	15,250.5	-	-	-	-	-	-
	2	기정	상암동 산4-1임 일원	5,768.8	-	5,768.8	-	-	-
	3	기정	상암동 34-15대 일원	1,620.6	-	1,620.6	-	-	-
	4	기정	상암동 산4-142임 일원	3,540	-	3,540	-	-	-
	5	기정	상암동 34-27대 일원	425.6	-	425.6	-	-	-
	6	기정	상암동 405-2전 일원	6,837	-	-	-	6,837	-
		변경	상암동 136-5전 일원	335.4	-	-	-	335.4	-	-	-
	7	기정	상암동 136-5전 일원	334	-	-	-	334	-
		변경	상암동 산14-3임 일원	783.9	-	-	-	783.9	-	-	-
	8	기정	상암동 산14-3임 일원	785	-	-	-	785	-
		변경	상암동 300-2답 일원	461.3	-	-	461.3	-	-	-	-
	9	기정	상암동 203-4답 일원	3,775	-	-	-	3,775	-
		변경	상암동 444전 일원	1,119.5	-	-	-	-	1,119.5	-	-
	10	기정	상암동 260-2답 일원	4,648	-	-	-	4,648	-
		변경	상암동 869-1답 일원	550.6	-	-	-	550.6	-	-	-

구 분			위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
완충 녹 지	소계	기정		46,168.2	4,922	7,342.2	14,415	19,489	-
		변경		45,646.9	-	7,342.2	1,1747.7	18,540.5	3,133.0	-	4,883.5
	1	기정	성산동 486-4답 일원	4,922	4,922	-	-	-	-
		변경	성산동 486-4답 일원	4,883.5	-	-	-	-	-	-	4,883.5
	2	기정	상암동 37-23대 일원	808.6	-	808.6	-	-	-
	3	기정	상암동 128-1답 일원	736	-	736	-	-	-
	4	기정	상암동 126-7전 일원	353.6	-	353.6	-	-	-
	5	기정	상암동 126-2전 일원	941.2	-	941.2	-	-	-
	6	기정	상암동 55-7전 일원	829.4	-	829.4	-	-	-
	7	기정	상암동 1538-6잡 일원	3,673.4	-	3,673.4	-	-	-
	8	기정	상암동 92전 일원	1,021	-	-	-	1,021	-
		변경	상암동 92전 일원	987.4	-	-	-	987.4	-	-	-
	9	기정	상암동 87-8대 일원	434	-	-	-	434	-
		변경	상암동 87-8대 일원	428.2	-	-	-	428.2	-	-	-
	10	기정	상암동 97-1대 일원	483	-	-	-	483	-
		변경	상암동 97-1대 일원	481.5	-	-	-	481.5	-	-	-
	11	기정	상암동 214-2전 일원	1,805	-	-	1,805	-	-
		변경	상암동 214-2전 일원	1,794.8	-	-	1,794.8	-	-	-	-
	12	기정	상암동 371-1답 일원	1,137	-	-	1,137	-	-
		변경	상암동 371-1답 일원	1,180.7	-	-	1,180.7	-	-	-	-
	13	기정	상암동 360-1답 일원	1,141	-	-	1,141	-	-
		변경	상암동 360-1답 일원	1,189.3	-	-	1,189.3	-	-	-	-
	14	기정	상암동 320전 일원	5,794	-	-	5,794	-	-
		변경	상암동 320전 일원	5,894.6	-	-	2,761.6	-	3,133.0	-	-
	15	기정	상암동 478-14잡 일원	3,216	-	-	3,216	-	-
		변경	상암동 478-14잡 일원	3,181.6	-	-	3,181.6	-	-	-	-
	16	기정	상암동 134-4전 일원	541	-	-	-	541	-
		변경	상암동 134-4전 일원	540.4	-	-	-	540.4	-	-	-
	17	기정	상암동 200-4전 일원	392	-	-	-	392	-
		변경	상암동 200-4전 일원	389.4	-	-	-	389.4	-	-	-

구 분			위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
완충녹지	18	기정	상암동 201전 일원	1,273	-	-	-	1,273	-
		변경	상암동 201전 일원	1,273.1	-	-	-	1,273.1	-	-	-
	19	기정	상암동 251-29답 일원	1,273	-	-	-	1,273	-
		변경	상암동 251-29답 일원	857.6	-	-	-	857.6	-	-
	20	기정	상암동 251-4답 일원	823	-	-	-	823	-
		변경	상암동 251-4답 일원	822.7	-	-	-	822.7	-	-	-
	21	기정	상암동 274-2전 일원	850	-	-	-	850	-
		변경	상암동 274-2전 일원	850.6	-	-	-	850.6	-	-	-
	22	기정	상암동 293답 일원	878	-	-	-	878	-
		변경	상암동 293답 일원	877.8	-	-	-	877.8	-	-	-
	23	기정	상암동 223답 일원	3,547	-	-	-	3,547	-
		변경	상암동 223답 일원	3,506.7	-	-	-	3,506.7	-	-	-
	24	기정	상암동 172-6답 일원	1,342	-	-	-	1,342	-
		변경	상암동 172-6답 일원	1,341.8	-	-	-	1,341.8	-	-	-
	25	기정	상암동 173답 일원	1,474	-	-	-	1,474	-
		변경	상암동 173답 일원	1,471.7	-	-	-	1,471.7	-	-	-
	26	기정	상암동 369답 일원	1,152	-	-	-	1,152	-
		변경	상암동 369답 일원	1,150.7	-	-	-	1,150.7	-	-	-
	27	기정	상암동 286답 일원	1,456	-	-	-	1,456	-
		변경	상암동 286답 일원	1,458.9	-	-	-	1,458.9	-	-	-
	28	기정	상암동 302-7답 일원	1,457	-	-	-	1,457	-
		변경	상암동 302-7답 일원	1,456.5	-	-	-	1,456.5	-	-	-
	29	기정	상암동 869-1답 일원	865	-	-	-	865	-			폐지
		변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	기정	상암동 794대 일원	643	-	-	-	643	-
		변경	상암동 794대 일원	645.5	-	-	-	645.5	-	-	-
	31	기정	상암동 140-2전 일원	371	-	-	371	-	-
		변경	상암동 140-2전 일원	629.5	-	-	629.5	-	-	-	-
	32	기정	상암동 산14-29임 일원	951	-	-	951	-	-
		변경	상암동 산14-29임 일원	1,010.2	-	-	1,010.2	-	-	-	-

(4) 철도시설(변경)

구 분		위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
계	기정		1,455	1,455	-	-	-	-
	변경		1,662.7	236.6	-	-	-	-	-	1,426.1
1	기정	상암동 1171-5답 일원	1,455	1,455	-	-	-	-
	변경	상암동 1171-5답 일원	1,426.1	-	-	-	-	-	-	1,426.1
2	추가	상암동 1270답 일원	236.6	236.6	-	-	-	-	-	-	신규

(5) 하수도시설(변경)

구 분		위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
계	기정		3,215	-	-	-	92	3,123
	변경		3,212.9	-	-	-	89.9	-	3,123.0	-
1	기정	고양시 덕은동 569-2천 일원	3,123	-	-	-	-	3,123
	변경	고양시 덕은동 569-2천 일원	3,123.0	-	-	-	-	-	3,123.0	-
2	기정	상암동 205-3전 일원	92	-	-	-	92	-
	변경	상암동 205-3전 일원	89.9	-	-	-	89.9	-	-	-

(6) 상하수도시설(변경없음) : 생략

(7) 공동구(변경)

구 분			위치	규격		연 장(m)		비 고
1		기정	대로 1-1, 대로3-30, 대로3-3	A-1, A-2, A-3 TYPE B TYPE C TYPE		2,468		공동구
구 분			위 치	계	1공구	2공구	3공구	비 고
1	기정		상암동 24-68임 일원	500	500	-	-	관리사무소
	변경		상암동 24-68임 일원	512.6	512.6	-	-

(8) 하천(변경)

구 분		위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
계	신규		1,257.0	-	-	-	-	1,257.0	-	-
1	신규	상암동 697전 일원	1,257.0	-	-	-	-	1,257.0	-	-

(9) 문화시설(변경)

구 분		위 치	계	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구	6공구	7공구	비고
계	신규		11,099.1	-	-	-	-	-	11,099.1	-
1	신규	상암동 산21임 일원	11,099.1	-	-	-	-	-	11,099.1	-

5. 기존 공공시설의 폐지로 인한 인근의 지장 유무 : 없음

6. 대체구거의 단면결정에 따른 수리계산서(변경없음) : 생략

7. 사업시행자 무상귀속도 및 국가, 지방자치단체 귀속도(변경없음) : 생략

(사업시행자 무상귀속도 : 생략)

※ 기타 자세한 사항은 서울특별시 주택건축국 임대주택과(☎ 2133-7081) 및 서울특별시 서울주택도시공사 택지사업본부 택지계획부(☎ 3410-7595)로 문의하시기 바랍니다.