서울특별시고시 제2020-  호

도시계획시설(하수도)사업 실시계획(변경) 고시

서울특별시고시 제2015-177호(2015.6.18)로 도시계획시설(하수도) 변경결정 및 고시되고, 서울특별시고시 제2016-59호(2016.3.10.) 및 서울특별시고시 제2018-5호(2018.1.11.)로 도시계획시설(하수도)사업  실시계획(변경)인가 고시된『신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사』와 관련하여, 사업기간 연장의 사유로 인해「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제88조 규정에 따라 도시계획시설(하수도)사업 실시계획을 변경하고, 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조 규정에 의하여 다음과 같이 고시 합니다.

2020년  1월  일

서울특별시장

가. 사업시행지 : 양천구 신월동 가로공원로 ~ 양천구 신월동 ~  목동유수지(변경없음)

나. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

ㆍ종    류 : 도시계획시설(하수도)

ㆍ명    칭 : 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

다. 사업규모 및 시행면적(변경없음)

1) 면적 : 71,569㎡

2) 규모

구 분		제 원	비 고
유 도 터 널	저지유도터널	∙터 널 : D=5.5m, L=877.1m
	고지유도터널	∙터 널 : D=5.5m, L=219.90m
빗 물 저 류 배 수 시 설	저류배수터널	∙터 널 : D=10.0m, L=3,629.7m
	저지수직구1	∙수 직 구 : D=5.4m, H=46.2m
	고지수직구	∙수 직 구 : D=5.4m, H=47.6m
	저지수직구2	∙수 직 구 : D=5.4m, H=45.8m
	환기수직구	∙수 직 구 : D=5.4m, H=42.3m
	유출수직구	∙수 직 구 : D=7.5m, H=39.8m
	유지관리수직구	∙수직구 : D=6.9m, H=52.2m
유수지개선		∙유수지 : A=15,452m2 ∙유수지 : A=56,710㎥2

라. 사업시행자의 성명 및 주소(변경없음)

1) 성명 : 서울특별시장

2) 주소 : 서울특별시 중구 세종대로 110

마. 사업의 착수 및 준공예정일

- 당초 : 실시계획고시일로부터 2019년 12월 31일까지

- 변경 : 실시계획고시일로부터 2020년 12월 31일까지

- 사유 : 환경부에서 제출한 하수도법 개정안(’19.4.25)이 국회에 계류중으로 개정이후 미보상 토지에 대한 보상계획 추진을 위한 기간연장

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지 ․지번 ․지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의

권리의 명세 및 그 소유자 ․권리자의 성명․주소 : (변경없음)

사. 기타 자세한 사항은 서울특별시 하천관리과(☏2133-3870) 및 서울특별시   도시기반시설본부 방재시설부((☏3708-8773, 8775)로 문의하시기 바랍니다.