서울특별시고시 제2017-485호

도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경 인가

1. 양주 별내지구 광역교통개선대책의 일환으로 서울특별시 노원구고시 제2011-61호(2011.12.08.)로 도시계획시설(도로) 경미한 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2015-53호(2015.02.26.)로 실시계획인가 고시, 서울특별시고시 제2017-65호(2017.03.02.) 로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가된 『남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사』에 대하여, 서울특별시공고 제2017-2428호(2017.12.07.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가를 위한 열람공고를 시행하였기에

2. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제88조 및 시행령 제97조에 따라 실시계획 변경인가하며 같은법 제91조 및 시행령 제100조에 따라 이를 고시합니다.

2017년  12월 28일

서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 일원 (변경없음)

○ 시점 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-69 (가스충전소)

○ 종점 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 (서울시계)

나. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

○ 종 류 : 도시계획시설(도로) 사업

○ 명 칭 : 남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사

다. 사업시행 규모 (변경없음)

○ 폭 38→42m, 연장 323m, 면적 18,215㎡

라. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

○ 성 명 : 한국토지주택공사장(LH공사장)

○ 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

마. 사업의 착수 및 준공 예정일 (변경)

○ 실시계획인가 고시일(2015. 02. 26.) ~ 2017. 12. 31. (당 초)

○ 실시계획인가 고시일(2015. 02. 26.) ~ 2018. 06. 30. (변 경)

바. 자금조달방안 : 붙임 (변경)

사. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 붙임 (변경없음)

아. 공공시설 등의 귀속 및 양도에 관한사항 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제99조에 의함. 단, 사업시행자는 준공 전에 관련 지방자치단체간 협의를 통하여 시설물 관리청 등을 명확히 하여야 하며, 시설물을 관리청에 인수인계 전까지는 사업시행자가 유지관리 시행함. (변경없음)

자. 기타 자세한 사항은 한국토지주택공사 서울지역본부 남양주사업단(☎031-528-5474),  서울특별시 도로계획과(☎02-2133-8087)에 문의하시기 바랍니다.

【붙임】

용 지 조 서

대로 1-13호선

일련 번호	소재지	지번	지목	지적면적 ( ㎡ )	편입면적 ( ㎡ )	소유자 및 관계인		비고
						성명	주소
1	노원구 공릉동	26-95	주	13	13	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
2	노원구 공릉동	26-96	잡	15	15	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
3	노원구 공릉동	26-98	대	56	56	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
4	노원구 공릉동	26-97	잡	1,354	1,354	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
5	노원구 공릉동	26-93	도	12,544	12,544	서울시	서울시
6	노원구 공릉동	26-94	학	4,233	4,233	한국토지 주택공사	경기도 성남시 분당구 돌마로 172
				6필지	18,215

자금조달방안

□ 단계별 집행계획 (당초)

(단위 : 억원)

구 분	계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	비 고
계	96	20	21	-	-	-	20	35
용 지 비	41	20	21	-	-	-	-	-
공 사 비	55 (110)	-	-	-	-	-	20 (50)	35 (60)	서울시구간 (담터1 전체)

□ 단계별 집행계획 (변경)

(단위 : 억원)

구 분	계	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	비 고
계	96	20	21	-	-	-	20	25	10
용 지 비	41	20	21	-	-	-	-	-
공 사 비	55 (110)	-	-	-	-	-	20 (50)	25 (40)	10 (20)	서울시구간 (담터1 전체)

※ 재원조달은 한국토지주택공사 자체예산으로 집행함(공사여건에 따라 사업비 변경 가능)