서울특별시고시 제2015 - 180호

서울특별시고시 제2014-103호 강일 도시개발구역 개발계획변경 및 실시계획변경인가, 지형도면 고시된 강일지구 11단지의 주택건설사업계획에 대하여 『공공주택건설 등에 관한 특별법』제35조의 규정에 의거 사업계획을 변경승인하고 이를 고시합니다.

2015 년 6월   일

서 울 특 별 시 장

강일지구 11단지 주택건설 사업계획 변경승인

1. 사 업 명 : 강일지구 11단지 아파트 건설공사

2. 사업주체 : 서울특별시 에스에이치공사 사장 변 창 흠

(서울시 강남구 개포로 621)

3. 사업위치 : 서울특별시 강동구 강일동 강일 도시개발사업지구내 11단지

4. 사업기간 : 2014.02.～ 2015.11.

5. 주택건설사업계획승인내역 : 붙임

6.「공공주택건설 등에 관한 특별법」제35조제4항에 의한 의제처리 사항

-「건축법」제11조에 의한 건축허가

7. 관계도서는 서울특별시 임대주택과 (☎ 2133-7063) 및 에스에이치공사 건축설계2팀(☎ 3410-7706)에 비치하여 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

강일지구 11단지 사업계획변경승인 내역

구 분			사 업 승 인 내 역		비고
			변경전	변경후
① 대 지 위 치			서울특별시 강동구 강일 도시개발사업지구내 11단지
② 대 지 면 적 (㎡)			9,811.00
③ 건 축 면 적 (㎡)			2,699.42	좌동
④ 건축 연면적 (㎡)			25,210.72	좌동
⑤ 건 폐 율 (%)			27.51	좌동
⑥ 용 적 률 (%)			178.17	좌동
⑦ 주택 규모	동수 및 층수		아파트 4동 346세대 (지하 1층, 지상7～10층)	좌동
	주택 형별	행복주택	전용 29A㎡ : 274세대 전용 29B㎡ : 72세대	좌동
		계	총 346세대	좌동
⑧ 사 업 기 간			2014.02. ～ 2015.10.	2014.02. ～ 2015.11.
⑨ 부대 복리 시설 현황	경 로 당		181.50 ㎡	좌동
	작은도서관		96.00 ㎡	162.81 ㎡
	관리사무소 (방재실,MDF실 포함)		226.39 ㎡	좌동
	보육시설		275.93 ㎡	좌동
	주민공동시설		258.01 ㎡	95.20 ㎡
	공동세탁실		-	95.42 ㎡
	경 비 실		17.73 ㎡	좌동
	어린이놀이터		612.26 ㎡	좌동
	기계,전기,발전기실		444.50 ㎡	좌동
	주 차 장 (지하주차장)		243대 (6,905.32 ㎡)	244대 (6,905.32 ㎡)
	공동저수시설(TON)		237 ton	좌동
⑩ 근린생활시설			-	96.00 ㎡