문서번호	급수운영과-20054
결재일자	2018.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
협조	주무관
	주무관

고척근린공원내 육본배수지 철거 완료보고

2018.8.

강서수도사업소

(급수운영과)

고척근린공원내 육본배수지 철거 완료보고

배수지 급수체계 개선으로 운영중단되어 폐쇄된 고척근린공원내 육본배수지에 대하여 구로구청 공원녹지과와 협의하여 철거 완료후 그 결과를 보고드림

▢ 시설현황

○ 위    치 : 구로구 고척2동 산9-14(고척근린공원내 산책로에 위치)

○ 설치년도 : 1985년 준공

○ 시설규모 : 500㎥/옹벽(2~3m높이), 및 콘크리트항, 주변 철제 휀스 설치(2.5m높이)

○ 운영현황 : 급수체계 개선에 따른 배수지 폐쇄로 가동중단(2009년)

▢ 배수지 철거 추진경위

○ 2017.05.16. : 구로구 고척 근린공원내 급수시설(육본배수지) 활용계획 회신요청(구로구 공원녹지과-7836)

○ 2017.06.02. : 본부 시설관리과에 폐 배수지에 대한 향후관리방안 검토요청

○ 2017.06.19. : 폐쇄배수지 철거결정 통보(본부 시설관리과-5521)

- 배수지 폐쇄후 장기존치로 주변관경과 부조화를 고려하여 구로구청측과 협의하여 철거 추진토록 함

○ 2017.07.28. : 배수지 철거를 위한 소요예산을 본부 2018년도 예산안에 반영 요청(80,000천원)

○ 2018.02.20. : 배수지 철거관련 사업소, 구로구청 공원녹지과간 업무협의

- 구로구청 공원녹지과에서 폐 배수지 및 인접 노인정 철거 후 녹지조성까지 일괄발주하여 철거공사 진행

○ 2018.03.09. : 구로구청에 철거공사비 납부(80,000천원)

○ 2018.04.~06. : 구로구청 공사발주하여 철거공사 진행

공사전	공사중	공사후

○ 2018.7.27. : 공사 준공 및 정산 통보(구로구청 공원녹지과-3324)

- 집행내용

(단위 : 천원)
공사명	공사기간	집행금액	비고
계		78,091
지장물 철거 및 녹지복원	2018.4.09.~5.28.	53,330
지장물 철거 폐기물처리	2018.4.25.~5.28.	14,421
지장물 철거지 수목식재공사	2018.6.01.~6.10.	10,340

(단위 : 천원)
납부금액	집행액	집행잔액	비고
80,000	78,091	1,909

▢ 향후 조치사항

○ 상수도사업본부(시설관리과)에 공사완료보고

○ 구로구청에 공사비 집행잔액(1,909천원)반납을 위한 고지서 발급