고화질 영상통합감시장비 현장 설치계획

□ 사업현황

◦ 사 업 명 : 아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역

◦ 사업개요 : 고화질 영상통합감시장비 설치 및 프로그램 개발 구축

◦ 사업기간 : ’16. 4. 29. ~ 9. 25.

◦ 계 약 자 : ㈜서광기전

□ 설치장비

품 목	수량	규 격	주 요 기 능	설치장소
뷰어서버	2대	□ CPU : 3.5㎓ □ Memory : DDR4 24GB	고화질 CCTV 영상을 통합하여 중앙감시반(DLP)에 표출하는 장비	통합정보센터
스트리밍 서 버	13대	□ CPU : 3.4㎓ □ Memory :DDR4 8GB	고화질 CCTV 영상을 통합정보 센터로 전송하기 위해 분배하는 장비	정수센터 : 4대 수도사업소 : 9대
스위칭 허 브	10대	□ 1000Base-X 2Port 이상 □ 10/100/1000Base-T 24Port 이상	고화질 CCTV 영상을 통합정보센터로 전송하는 장치(네트워크 연결장치)	정수센터 : 3대 수도사업소 : 7대

□ 설치계획

○ 장비 설치일정

장비명	본부	정수센터			수도사업소
		광암	뚝도	영등포	중부	동부	서부	강서	남부	강남	강동
뷰어서버	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스트리밍서버	-	2	2	-	2	1	1	1	2	1	1
스위칭허브	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
설치일정	’16. 8.16.	’16. 8.17.	’16. 8.18.	’16. 8.19.	’16. 8.22.	’16. 8.23.	’16. 8.24.	’16. 8.25.	’16. 8.26.	’16. 8.29.	’16. 8.30.

○ 주요 추진내용

- 기존 저화질 영상통합감시장비(DVR, VDA, NVR) 철거

- 고화질 영상통합감시장비(스트리밍서버, 스위칭허브) 설치

- 전원케이블, UTP케이블 포설 및 부대공사