서울특별시공고 제2016-  호

도시계획시설(도로)사업 실시계획인가를 위한 열람공고(안)

1. 양주 별내지구 광역교통개선대책의 일환으로 서울특별시 노원구고시 제2011-61호(2011.12.8)로 도시계획시설(도로) 경미한 변경결정 및 지형도면 고시, 서울특별시고시 제2015-53호(2015.02.26)로 실시계획인가 고시된 『남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사』에 대하여 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가 신청이 있어, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은법 시행령 제97조에 의거 지하차도 연장축소 등에 따른 도시계획시설(도로)사업 실시계획변경 작성하고, 같은법 제90조 및 같은법 시행령 제99조에 따라 아래와 같이 열람 공고합니다.

2. 관계도서는 한국토지주택공사 서울지역본부 및 서울특별시 도로계획과에 비치하여 일반인에게 열람하오니, 열람내용에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내 의견서를 열람장소에 서면으로 제출하여 주시기 바라며, 기타 자세한 사항은 열람 장소로 문의하여 주시기 바랍니다.

2016년  12월   일

서 울 특 별 시 장

가. 실시계획인가에 대한 사항

1) 사업시행지의 위치 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-84 일원 (변경없음)

2) 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

○ 종 류 : 도시계획시설(도로) 사업

○ 명 칭 : 남양주 별내지구 주변도로(서울시구간-화랑로) 확장 및 지하차도 설치공사

3) 사업시행 규모 (변경없음)

○ 폭 38→42m, 연장 323m, 면적 18,215㎡

4) 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

○ 성 명 : 한국토지주택공사장(LH공사장)

○ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 (정자동 217) (당 초)

경상남도 진주시 충의로 19(충무공동) (변 경)

5) 사업의 착수 및 준공 예정일 (변경)

○ 실시계획인가 고시일(2015.02.26) ~ 2016. 12. 31 (당 초)

○ 실시계획인가 고시일(2015.02.26) ~ 2017. 12. 31 (변 경)

6) 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소 : 붙임 (변경없음)

7) 열람기간 : 공고일 다음날부터 14일간

8) 열람장소

○ 한국토지주택공사 서울지역본부 남양주사업단 (☎031-528-5474)

○ 서울특별시 도로계획과 (☎02-2133-8089)