등록번호

푸른도시과-2754

주무관

공원관리팀장

푸른도시과장

등록일자

2019.2.25.

결재일자

2019.2.25.

공개구분

대시민공개

협  조

공공공지 이용환경개선(시민참여예산) 사업계획

서 대 문 구

푸른도시과

공공공지 이용환경개선(시민참여예산) 사업계획

훼손된 공원시설물을 정비하여 안전한 공원 환경을 조성하고 이용주민들의

만족도 향상에 기여하고자 함

□ 추진근거

○ 2019년 시민참여 예산사업 추진계획 알림(조경과 – 533호, 2019. 1. 10.)

□ 추진방향

○ 노후되고 훼손된 공원시설물을 정비하여 안전사고를 예방하고 주민들의 불안감

해소에 기여

○ 지역 주민들의 의견을 적극 수렴하여 이용 만족도 향상

□ 추진개요

○ 사 업 명 : 공공공지 이용환경개선(시민참여예산)

○ 위    치 : 홍박마을마당(홍은동 11-23 일대, 홍은1동제4공영주차장 상부)

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 9.

○ 사업내용 : 보강 압성토 옹벽 안전진단 및 정비, 벽면녹화, 체육시설 교체 등

※ 2009년 공영주차장 상부에 공원을 조성하였으며, 현재 주택과 접한 옹벽 전면부의 철근이

부식되어 떨어지며 흙이 유실되어 안전진단 이후 정비하고자 함

○ 소요예산 : 100백만원(시비) - 시설비

□ 추진일정

○ 2019. 2. 25. : 제안자 면담, 계획 수립

○ 2019. 3. ~ 4. : 구조물 안전진단 및 도면작성 용역 시행

○ 2019. 4. ~ 5. : 설계심의 의뢰(서울시), 공사 계약심사 의뢰

○ 2019. 5. ~ 9. : 공사 시행 및 준공

붙임  1. 사업계획서(서울시) 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.  끝.