공동주택 충전인프라 구축사업 3차 공모 안내

1. 배  경

□ 정부, 에너지신산업 활성화 방안으로 전력산업 10대 Project 추진

□ 공동주택 충전기 선제적 구축으로 EV 보급 활성화 및 온실가스 감축

2. 사업 개요

□ 대    상 : 전국 공동주택 최대 4,000개 단지(입주민 합의 필요)

※ 재건축 대상 및 변압기 용량부족 단지 제외

□ 예    산 : 950억원 (예산 소진시까지 순차 시행)

□ 구축 및 운영

구 분	내 용
구 축	입주자 대표와 협약 체결 후 한전이 시공·소유 - APT 수전설비 이용 변압기 공동이용고객으로 모자 분리
과금·결제	기본요금이 포함된 사용량 요금제 운영 - (한전) 직접 과금 및 수납, (이용자) 사용량 대금 결제
유지보수	아파트 전기안전관리자 또는 충전사업자에게 위탁 ※ 위탁방안은 개방형 충전소를 포함하여 별도 검토

3. 1, 2차 공모 결과

구 분		1 차	2 차	계
기 간		10.7∼10.21	11.7∼11.18
APT (단지)	접수	366	596	962
	선정	233	420	653
충전기 (기)	급속	237	339	576
	완속	477	859	1,336

※ 세부 내역은 관할 사업소에 문의

4. 3차 공모 계획

□ 대    상 : 전국 공동주택 최대 4,000개 단지(입주민 합의 필요)

※ 재건축 대상 및 변압기 용량부족 단지 제외

□ 기간/예산 : 12.19(월) ~ 12.30(금)  (2주간) / 약 750억원

□ 공고 및 접수 : 공지사항 홈페이지 공지 및 인터넷 접수

□ 접수내용

○ 입력사항

▪ APT 정보 : 세대수, 계약전력, EV사용자수, 입주년도, 주차면 등

▪ 구축 희망 충전기 수 : 세대별 설치기준 이내에서 희망수량 반영

▪ 제출서류 : 충전기 설치동의서 (현장조사시 제출 가능)

○ 설치기준 : 300세대 미만 소규모 단지 급속충전기 설치 제외

급속충전기		완속충전기
세 대 수	설치기준	세 대 수	설치기준
300세대 이상 ∼ 1,500세대 미만	1대	500세대 미만	2대
		1,000세대 미만	3대
		1,500세대 미만	4대
1,500세대 이상	2대	2,000세대 미만	5대
		2,000세대 이상	6대

※ 이동형충전기는 추후 시범적용 검토 예정

□ 대상선정

○ 현장조사 후 설치대상 선정

○ 예산 초과시 계량화 후 고득점 우선 시행 (30점미만은 후순위 추진)

5. 추진 일정

공모 및 심사 (2주간)	▶	현장조사	▶	최종확정	▶	협약/시공
‘16.12.30		‘17. 1.25		‘17. 1.31		‘17.2월~

[붙임 #1]

공동주택 대상 충전인프라 구축사업 소개

▣ 고정형 충전인프라 구축 : 단지당 설치기준 이내 신청수량 반영

□ 구축대상 : 입주민간 충전인프라 구축이 합의 완료된 공동주택

○ 재건축 추진 APT, 변압기 용량부족 APT는 제외

○ 충전시설 및 부속시설물 설치부지 제공 조건

□ 운영모델 : (한전) 직접 과금 및 수납, (관리사무소) 유지관리 대행

□ 구축방법 : APT 수전설비 이용

<전력공급 계통구성>

KEPCO

※ 변압기 공동이용고객으로 모자 수용분리

□ 설비소유 : 한전 시공·소유

□ 유지관리 : 위탁관리

※ 위탁대상 : APT 관리사무소 또는 충전사업자

□ 진행절차

대상공모 및 신청	▶	현장점검	▶	대상확정 및 통지	▶	협약체결	▶	설계 및 시공

[붙임 #2]

공동주택 대상 충전인프라 구축사업 안내문

한국전력공사에서는 온실가스 감축과 전기차 활성화를 위해 정부 정책의 일환으로 공동주택을 대상으로 전기차 충전기 설치사업을 추진 하오니 아래와 같이 신청하여 주시기 바랍니다.

□ 공모대상 : 전국 공동주택(입주민간 합의 필요)

※ 재건축 추진 아파트, 변압기 용량부족 아파트, 설치곤란 아파트는 제외

□ 접수기간 : '16.12.19∼12.30 (2주간)   ☞  미달시 예산범위 내 추가접수 예정

□ 사업규모 : 최대 4,000개 단지에 전기차 충전기 설치

□ 신청방법 : 한전 홈페이지 내 공지사항 페이지 접속 후 신청

* 홈페이지 주소 : www.kepco.co.kr   * 입주자대표 명의로 접수

□ 접수사항

▪ APT 정보 : 세대수, 계약전력, 전기자동차 사용자수, 입주년도, 주차면 등

▪ 구축 희망 충전기 수 : 세대별 설치 기준 이내에서 희망수량 반영 (급·완속 혼용)

급속충전기		완속충전기
세 대 수	설치기준	세 대 수	설치기준
300세대 이상 ∼ 1,500세대 미만	1대	500세대 미만	2대
		1,000세대 미만	3대
		1,500세대 미만	4대
1,500세대 이상	2대	2,000세대 미만	5대
		2,000세대 이상	6대

※ 이동형충전기는 추후 시범적용 검토 예정

▪ 제출서류 : 충전기 설치 동의서 ☞ 先 접수 후 현장 조사시 제출 가능

□ 선정방법 : 접수된 APT 중 현장조사를 거쳐 동의 및 설치 가능여부를 고려하여 대상 선정

□ 기타사항

○ 충전기는 굴착·포장이 불필요한 주차장에 설치하여야 합니다. (놀이터, 길가 등 불가)

○ 충전기는 전원에서 먼 곳에 설치하면 전압강하 등으로 동작되지 않을 수 있습니다.

○ 벽면 천공 등은 건물 구조에 영향을 줄 수 있으므로 한전에서 시행하지 않습니다.

○ 기술적으로 충전기 설치가 곤란한 개소는 대상에서 제외될 수 있습니다.

□ 사업절차

* 문의사항 : 한전 신사업기획단(☏ 061-345-3971∼6)

[붙임 #3]

전기차 충전기 설치 동의서

○ 공동주택명 :

○ 주      소 :

한국전력공사가 아파트에서 신청한 전기차 충전기를 아파트 단지내에 설치 및 운영하는 것을 동의하며, 전기차 사용자가 시설을 이용하는 것에 대해 이의를 제기하지 않을 것을 동의합니다.

2016. 12.   .

입주자대표회의 회장 또는 대표자

○ ○ ○          (직인)

(회장 또는 대표자 휴대전화 :  ☎                       )

---------------------------------------------------

※ 아래 입주자 동의 서명란은 상기 입주자 대표회의 회장 또는 대표자  날인 또는 서명이  없는 경우 작성하시기 바랍니다.

호 수	연락처	호수	연락처	호수	연락처	호수	서명
성 명	서 명	성 명	서 명	성 명	서 명	성 명	서 명

○ 입주자 동의 서명란

[붙임 #4]

공동주택 대상 충전인프라 구축사업 Q&A

1. 입주민간 충전인프라 설치 합의 필요라고 하면 무조건 100% 동의가 있어야 하나요?

- APT 단지 내부 규정에 따른 합의 절차를 거치시면 됩니다. 다만, 입주자 대표회의가 없는 곳에서는 입주민 전원의 개별 동의가 있어야 합니다.

2. 입주자 대표회의가 없으면 무조건 신청이 불가능 한지요?

- 입주민 전원의 개별동의가 있으면 신청이 가능합니다. 또한, 우선 신청 후 현장 조사시 개별동의서를 제출하셔도 됩니다.

3. 공동주택은 아파트만 해당되나요, 오피스텔 및 주상복합 아파트도

해당되나요?

- 공동주택은 다세대주택, 연립주택, APT, 기숙사 등을 말하며, 주상복합 APT도 해당됩니다. 그러나, 오피스텔은 건축법상 업무시설로 구분되어 있어 해당되지 않습니다.

4. 공모에서 당첨되면 공사비는 누가 감당하나요? 아파트에서 부지 제공 외에 추가 돈이 드는지요?

- 충전설비를 구축하는 공사비 일체를 한전에서 부담하므로, 아파트는 아무런 비용이 필요하지 않습니다. 아파트에서는 충전설비를 설치할 수 있는 부지만 제공하면 됩니다.

5. 고장시 및 유지보수는 누가 해야 하나요? 아파트에서 유지보수 관련 비용을 부담해야 하나요?

- 아닙니다. 한전이 시공·소유하는 한전 재산이므로, 유지보수는 한전에서 시행합니다.

6. 충전전력 요금은 어떤 방식으로 결제되나요?

- 충전전력 요금은 사용자가 현장에서 신용카드로 결제하는 방식입니다. 계량기가 별도로 부착되어 공동전기료, 관리비 등에서는 전혀 부담이 없습니다.

7. 공모 접수 후 아파트에서 한전에 지원해야 하는 절차는 무엇인가요?

- 입주자 동의서를 제출하여야 하며, 설치부지 제공을 위한 협약을 체결해야 합니다. 또한, 설치공사 및 유지 보수시 적극 협력하여야 합니다.

8. 신청 단지가 4,000단지가 넘지 않으면 신청한 아파트는 최소 점수에 상관없이 전부 충전인프라를 구축해 주나요?

- 예산범위 내에서는 신청된 공동주택은 모두 시행합니다. 다만, 예산을 초과하여 신청된 경우에는 우선순위에 따른 계량화 후 고득점 단지를 우선 시행합니다.

9. 공모기간이 끝난 후 얼마나 기다려야 대상선정이 되었는지를 알 수 있나요? 언제쯤 공모결과를 발표하나요?

- 공모기간이 끝나면 신청한 APT 단지를 대상으로 현장조사를 시행 후 대상을 확정합니다. 사업소마다 편차는 있겠지만 대략 2주일 전후가 소요될 예정입니다.

10. 제조사별로 충전기 디자인이 각기 다른 것으로 알고 있는데, 충전기 모델을 공동주택에서 선정할 수 있는지요?

- 충전기는 한전에서 일괄로 구매하여 설치하므로, 특정 충전기 모델을 공동주택에서 선택할 수는 없습니다.

11. 재건축 추진아파트는 공모대상에서 제외한다고 하는데, 재건축 추진아파트의 정확한 정의는 무엇인지요?

- 재건축 추진아파트라 함은 재건축 조합 설립인가를 받은 아파트로 정의합니다.

12. 아파트 단지 내에 전기차가 없는데도 신청이 가능한지요?

- 전기자동차가 없는 단지도 신청이 가능합니다.

13. 외부인들이 아파트 단지 내에서 충전을 한다고 하면 무조건 개방해 주어야 하는지요?

- 아파트 단지에 설치하는 충전기는 입주민들만 사용하는 것이 원칙입니다.

14. 아파트 변압기 용량이 초과 될 때, 공동주택에서 변압기 용량 증설공사를 할 경우는 충전기 설치가 가능한지요?

- 아파트 변압기 용량이 부족할 경우에는 충전기 설치가 불가합니다. 다만, 미리 변압기 용량 증설공사를 시행할 경우 충전기 설치용량이 확보되므로 충전기 설치가 가능합니다.

15. 저압공급 공동주택인 경우에도 충전기 설치가 가능한지요?

- 저압공급 공동주택인 경우에는 별도의 한전 수전으로 설치가 가능합니다.

16. 충전기 설치위치 선정시 동마다 분리해서 신청이 가능한지요?

- 충전기 설치 위치는 단지에서 선정하는 사항이나, 집합 설치하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 다음의 장소는 불가합니다.

① 굴착·포장이 필요하거나, 전원에서 멀어서 전압강하가 예상되는 장소

② 벽면 천공 등 건물 구조에 영향을 줄 수 있는 장소

③ 주차구획선이 없는 장소 (놀이터, 길가 등)

④ 기타 기술적으로 충전기 설치가 곤란한 개소

17. 아파트 내에서 충전하게 되면 외부에 설치된 전기차 충전소보다 요금이 저렴한가요?

- 외부에 설치된 공용 충전기는 급속 위주로 요금은 홈충전 요금보다 비쌉니다. 단지 내 설치되는 충전기는 홈충전 요금을 적용할 계획입니다.

18. 아파트 세대수 관련 설치기준보다 더 설치할 수는 없나요?

- 기준에 제시된 설치기준 내에서 설치하여야 합니다.

19. 향후 충전기 교체시 누가 교체비용을 감당하나요?

- 충전기는 한전의 소유로 운영되며, 충전기 교체 사유에 따라 부담주체가 달라집니다. 차량충돌 등 외부 요인에 의한 교체는 원인 유발자가 부담하여야 하며, 내부 요인에 의한 교체는 한전에서 부담합니다.

20. 전기차 구매시 지원되는 충전기 보조금도 아파트 충전인프라 구축시에도 지원되나요?

- 전기차 구매시 지원되는 충전기 보조금은 개인에게 지원되는 것으로, 이번 사업과는 무관합니다. 따라서, 이번 사업으로 아파트에 충전기를 설치하였더라도, 개인적으로 전기차 구매시 충전기 보조금을 받아 추가로 설치할 수 있습니다.

21. 충전기 설치 신청 후 진행절차는 어떻게 되나요?

- 공동주택 충전인프라 구축사업의 진행절차는 아래와 같습니다.

대상공모	▶	현장점검	▶	대상확정	▶	협약체결	▶	설계 및 시공

22. 신청시 고객번호, 비밀번호는 어떤 것을 입력해야 하나요?

- 고객번호는 한전의 고객번호 10자리(전기요금고지서 참조), 비밀번호는 임의의 숫자 4자리를 입력하시면 됩니다.

23. 열병합 발전을 사용하는 단지도 본 사업에 참여할 수 있나요?

- 열병합 발전을 사용하는 단지는 변압기 공동이용이 가능하도록 역송방지장치를 설치한 후 본 사업 참여가 가능합니다.

24. 구역전기사업자의 전기를 사용하는 경우 신청해도 되나요?

- 구역전기사업자 공급 지역은 본 사업 참여가 불가합니다.