유성건설주식회사

우 138-961 서울 송파구 백제고분로50길 19-28, 202호(방이동)   전화 (02)6402-8114  팩스 (02)6409-8114

문서번호	:	제 2014 – 중랑 63호
시행일자	:	2014. 6. 16.
주 소	:	서울특별시 성동구 용답동
		장안벌길 53(용답동250)
수 신	:	서울시설공단
참 조	:	공사감독2처

선결			지시
접수	일자 시간		결재 · 공람
	번호
처 리 과
담 당 자

제   목 : 2차공사 공사기간 연장에 관한건

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사명 “중랑교 보수보강공사”와 관련하여

가. 신공종발생으로 인한 공기증가

- 신축이음교체공 중 조인트 커버 제작 및 설치기간 약 18일

나. 교량하부 단면증강을 하기위한 지장물 이설공사(펌프인입선 이설공사)

- 인입선 이설공사 : 5월15일 ~ 5월30일, 16일지연

3. 공기연장(당초 2014년 6월 27일, 변경 2014년 7월 30일)을 신청 하오니 검토후 처리하여 주시기 바랍니다.

유  성  건  설  주  식  회  사

대표이사   이  영  주     (인)