개봉철도고가 바닥판 교체 실시설계

공사중 교통소통대책

-교통규제 협의 요청서-

2019. 08

	서울시 도시기반시설본부

개봉철도고가 바닥판 교체공사 공사중 교통소통대책

1. 공사 목적 및 개요

1.1 공사목적 및 개요

○ 개봉철도고가교는 지하철 1호선 철도로 인하여 발생한 구로구 개봉본동과 개봉2동간의 교통장애를 극복하기 위하여 1977년에 B=22.0m, L=148.0m로 건설되었으며, 2001년 이후 보수공사가 이루어지고 있음

○ 노후화된 개봉철도고가의 바닥판 전체 교체와 1등교로 성능개선 가능여부를 함께 검토하여 대안을 제안하고 교량의 유지관리 방향을 제시

○ 교통소통대책은 도로점용 공사시 교통영향을 분석하여 도로점용으로 인해 예상되는 문제점을 분석하고, 이를 최소화하기 위한 교통소통대책 및 시행계획을 수립하는데 그 목적이 있음

< 공사개요 >

구 분	내 용
공 사 명	◦개봉철도고가 바닥판 교체공사
시 행 자	◦서울특별시 도시기반시설본부
공사구간	◦총 공사면적 : 3,450㎡(본교 구간 : 23.0m × 150m)
공사기간	◦기간: 2019년 08월01일 ～ 2021년 11월30일 (총 28개월) - 1 단 계 : 2019년 08월01일∼2019년 09월30일 ( 60일) - 2 단 계 : 2019년 10월01일∼2019년 11월30일 ( 60일) - 3-1단계 : 2019년 12월01일∼2019년 12월06일 ( 7일) - 3-2단계 : 2019년 12월07일∼2019년 12월13일 ( 7일) - 4 단 계 : 2019년 12월14일∼2019년 12월15일 ( 2일) - 5 단 계 : 2019년 12월16일∼2019년 12월18일 ( 3일) - 6 단 계 : 2019년 12월19일∼2019년 12월31일 ( 13일) - 7 단 계 : 2020년 01월01일∼2020년 09월30일 (270일) - 8 단 계 : 2020년 10월01일∼2021년 05월31일 (240일) - 9 단 계 : 2021년 06월01일∼2021년 06월07일 ( 7일) - 10-1단계 : 2021년 06월08일∼2021년 06월14일 ( 7일) - 10-2단계 : 2021년 06월15일∼2021년 10월15일 (120일) - 11단 계 : 2021년 10월16일∼2021년 11월30일 ( 45일)
점용시간	◦주·야간공사 (전일점용, 24시간)
공사유형	◦프리캐스트 콘크리트 패널을 사용한 바닥판 교체 ◦스틸 플레이트 거더로 거더 교체 ◦가교 설치
공사내용	◦개봉철도고가 슬라브 전면교체 : 3,450㎡ ◦구조물 보강･보수 (하부)

1.2 공사방법

○ 가교설치 및 상부 교체공사등 단계별 작업공정 및 세부 공사사항은 다음과 같음

< 공사내용 >

공사	단계별 순서	작업 공종	세부 작업내용	비고
가교 설치	1단계	교통통제 및 안전시설 설치	◦교통통제수 배치 ◦안전시설 설치	-
		간섭구조물 철거	◦방음벽, 옹벽상단 철거
	2단계 3-1단계 3-2단계	하부 벤트 설치	◦벤트 말뚝 설치
		상부 가설교량 설치	◦크레인 거치 ◦가설교량 설치
	4-1단계 4-2단계 5단계 6단계	가교연결공사	◦종점부 토공정지 ◦중분대 철거 ◦차선도색 및 차로 우회	-
오류IC방향 철거 및 신설	7-1단계 7-2단계	오류IC방향 교량 상부 철거	◦기존 포장층 철거 ◦바닥판 철거 ◦기존 거더 철거
		오류IC방향 교량 상부 설치	◦신규 거더 설치 ◦신규 바닥판 설치 ◦상부 교면 포장 ◦차선도색 및 차로 우회
구로IC방향 철거 및 신설	8단계	구로IC방향 교량 상부 철거	◦기존 포장층 철거 ◦바닥판 철거 ◦기존 거더 철거	-
		구로IC방향 교량 상부 설치	◦신규 거더 설치 ◦신규 바닥판 설치 ◦상부 교면 포장 ◦차선도색 ◦교량 안전시설물 설치
가교 철거	9-1단계 9-2단계 9-3단계 10-1단계 10-2단계 11단계	가교 상부 철거	◦가교 바닥판 철거 ◦가교 거더 철거	-
		가교 하부 벤트 철거	◦가교 하부 벤트 철거
		부대공	◦원상복구 ◦간섭구조물 원상복구 ◦안전시설 철거 ◦부대시설 복구

1.3 예정공정표

가. 공종별 표준공정표

○ 공종별 표준공정은 다음과 같음

< 공종별 표준공정표 >

공종		1		2		3		4		5		6		7		8		9		비 고
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225	240	255	270
가교 설치	교통통제 및 현장준비																			-
	간섭구조물 철거																			-
	하부 벤트 설치																			-
	상부 가설교량 설치																			-
오류IC방향 철거/신설	가교연결공사																			종점 토공포함
	오류IC방향 교량 상부 철거																			-
공종		10		11		12		13		14		15		16		17		18		비 고
		285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540
오류IC방향 철거/신설	오류IC방향 교량 상부 설치																			-
구로IC방향 철거/신설	구로IC방향 교량 상부 철거																			-
공종		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		비고
		555	570	585	600	615	630	645	660	675	690	705	720	735	750	765	780	795	810	825	840
구로IC방향 철거/신설	구로IC방향 교량 상부 설치																					-
가교 철거	가교 상부 철거																					-
	가교 하부 벤트 철거																					-
	부대공																					-

주 : 우기 및 현장여건에 따라 변경될 수 있음.