돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사

□ 공사개요  <의뢰부서 : 도시공간개선단, 조경과>

○ 위    치 : 종로구 송월길2(돈의문 박물관마을)

○ 규    모 : 기존 건물(5동) 구조보강 및 벽면녹화

- 수직정원 552㎡, 옥상녹화 300㎡, 가로녹지 148㎡, 온실1동 증축

○ 시공업체 : (유)연일종합조경 외 2개 업체

○ 공사기간 : '19. 11.11.~'20.05.08(6개월)

○ 공사감독 : 서울시설공단 외 1개업체

위치도	조감도

□ 추진경과

○ '18.07.17. : 시장 요청사항 제925호(추진부서 - 조경과)

- “수직정원을 시범 설치하는 등 도시녹화의 새로운 방안 모색”

○ '18.09.03. : 수직정원 추진계획(행정2부시장 방침)

○ '18.09.11. : 수직정원 TF구성 및 운영(도시공간개선단)

○ '18.12.24. : 당선작 발표–“Vertical Gardening” ㈜그람디자인

○ '19.01.16. : 용역 착수보고회

○ '19.03.08. : 종로구청장 보고

○ '19.03.22. : 행정2부시장 보고

○ '19.04.22. : 설계용역 준공기한 연기 (도시공간개선단)

○ '19.06.04. : 푸른도시국, 도시기반시설본부 보고

작 성 자	방재시설부 : 이임섭 ☎ 3708-8740, 공원시설과장 : 오춘섭 ☎ 2430, 담당 : 손병도 ☎ 8732

○ '19.06.14. : 용역 중간보고회(총괄MP,도시공간개선단)

○ '19.06.21. : 설계용역 준공기한 연기(2회)

○ '19.06.28. : 행정2부시장 보고

○ '19.07.16. : 좋은빛 위원회 심의

○ '19.08.13. : 건설기술심의

○ '19.08.27. : 설계용역 준공(공간개선단)

○ '19.09.24. : 공종분리검증위원회 개최

○ '19.09.30. : 계약심사 완료

○ '19.10.18. : 예산재배정(조경과→방재시설부)

○ '19.10.22. : 공사발주 및 계약의뢰

○ '19.11.07. : 건축 감리용역 발주 및 계약의뢰

○ '19.11.11. : 공사착공

□ 현안사항

○ 서울도시건축비엔날레 행사(’19.9.7~11.10) 전시작품 철거 지연 및 박물관마을 건축물 대실로 인해 실제 공사착공 지연

□ 조치계획

○ 관계부서 실무협의를 통해 전시 작품이 조기에 철거될 수 있도록 촉구

[문화정책과(돈의문 박물관마을팀),도시공간개선단(도시건축센터)]

□ 향후일정

○ '19. 11.13 : 관계부서 실무회의 개최

○ '19. 11.18 : 공사착공(실착공)

○ '20. 05.08 : 공사준공 및 시설물 인수인계