업무연락전
지시번호	SMIH-14-23728	연번(문서번호)	SMIH-14-23728
지시일자		작성일자	2014-04-22
지 시 자	김학지	처리기한
제 목	공사공정촉구
내 용
1. 하천관리과-6625(2014.4.21.), 하천관리과-6876(2014.4.16.)호와 관련입니다. 2. 하천관리과, 동대문구청으로부터 신이문빗물펌프장 증설공사 공정지연으로 하철기 수방대비 문제 발생 우려가 있다는 지적이 있어 통보하오니, 감리사 및 시공사는 공정추진에 만전을 기하여 2014.5.15.이전 펌프가동이 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. 가. 추진일정 〇 2014.4.30. : 토목구조물 완료(지하, 조합수조 등) 〇 2014.5.10. : 펌프설치완료(기전지설) 〇 2014.5.11.~5.14 : 무부하테스트 시행 〇 2014.5.15. : 펌프가동 따로붙임 : 관련공문 각1부(별도첨부). 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부