문서번호	토목부-10367
결재일자	2019.6.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김성권		박일연	06/13 代이동훈
협조
	주무관		이준범

준공기한 연기 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(토 목 부)

준공기한 연기 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업(1차) -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업(1차)』의 동절기 미착공,  관급자재 수급지연, 자치구 요청사항 반영 등을 위한 준공기한 연기 검토 보고임.【창덕궁감 2019-49 계약변경 검토보고】

Ⅰ				공사개요

□ 위    치 : 돈화문로 외 5개 주요가로

□ 규    모 : 도로정비 연장 2,400m

□ 공사기간 : (총차)`18.12.26.~`19.12.31.[18.12.26.~'19.6.30.(1차분)]

□ 공 사 비 : 6,725,138천원(총차),  5,800,000천원(1차)

□ 시 공 사 : 다이치건설주식회사

Ⅱ				검토내용

□ 준공기한 연기사유

□ 동절기 미착공 및 관급자재 수급지연

- 105일(2018. 12. 26. ~ 2019. 4. 09.)

□ 자치구(종로구) 요구사항 반영을 위한 공사중단

- 48일(2019. 5. 14. ~ 2019. 6. 30.)

[자치구 요구사항]

‣ 도로선형 조정(직선 → 부분적으로 곡선화 구획)

‣ 차량속도 제한(30㎞/h → 20㎞/h)

‣ 가로시설물 설치 최소화, 가로수 덮게와 보도의 동일 재료 시공 등

□ 감리단 검토 의견

- 동절기 미착공, 자재수급 지연과 함께 자치구 요구사항 설계반영을 위한 공사중단 등을 고려하여 1차 공사기간 연장이 타당함.

□ 준공기한 연기[1차분]

구 분	준 공 기 한 연 기		증 · 감
	당 초	변 경
공 사 금 액	5,800,000천원	5,800,000천원	변경사항없음
착공년월일	2018년 12월 26일	2018년 12월 26일	변경사항없음
준공년월일	2019년 06월 30일	2019년 11월 30일	증)153일

Ⅲ				조치의견

□ 상기와 같이 동절기에 의한 미착공, 관급자재 제작/수급 지연과 함께 자치구 요구사항 반영을 위한 설계변경 등으로 인한 공사중단 등을 고려하여 공사기간(1차) 연기는 타당한 것으로 사료되므로.

□ 감리단으로 하여금 준공기한 연기에 따른 행정조치를 우선 시행토록 조치하고 향후 설계변경을 통하여 준공기한을 연기하여 공사 추진에 어려움이 없도록 조치코자 합니다.

붙임 : 준공기한 연기 검토(감리단 및 시공사) 각 1부. 끝.