건설사업관리기술자 검토의견서

기술검토 건 명	준공기한 연장(2차) 검토
공 사 명	종로 중앙버스전용차로 설치공사	검 토 자	정 해 성
검토기간	2018. 06. 25
근거공문	천마산(종로)18-075호, 도성2018-3167호

□ 개   요

◉ 건설사업관리 업무지침서 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 4. 설계변경,       공기연장 등 주요사항 발생시 발주청으로부터 검토․지시가 있을 경우 현지       확인 및 검토․보고

□ 현  황

가. 준공기한(1차) 연장

1. 2018년 연등회 행사(‘18.05.12) 지원〔교통운영과/문화관광과 지원 요청)

구 분	당 초	변 경
시공사 준공기한	2017.08.29∼2018.04.30 공사비 : 7,673,102,000원	2017.08.29∼2018.06.30(증2개월) 공사비 : 7,673,102,000원(변경없음)
건설폐기물 처리용역 준공기한	2017.09.13∼2018.04.30 공사비 : 521,065,000원	2017.09.13∼2018.06.30(증2개월) 공사비 : 521,065,000원(변경없음)
연기의 사유	➀ 서울시 행사(이동식정류소 보수) : ‘18.05.12 ➁ 추가공사 발주 및 행정처리 : 교차로포장, 자전거도로 도막 포장/부대시설 설치

나. 관련문서

- ‘18.04.10(도시기반시설본부18-3498호) :

2018년 연등회 축제 행사관련 준공기한 연기 검토

- ‘18.04.03(문화예술과-4619호) : 2018년 연등축제 개최에 따른 협조 요청

- ‘18.03.23(대불봉 제2018-099호) : 2018년 연등회 및 봉축행사 협조요청의 건

□ 준공기한(2차) 연장 검토내용

가. 준공기한(2차) 연장

1. 시공사 준공기한

구 분	당 초	변 경
준공기한(2차)	2017.08.29∼2018.06.30	2017.08.29∼2018.07.31
증 · 감	-	증 1 개월
공사금액	7,673,102,000원	7,673,102,000원

2. 건설폐기물 처리용역

구 분	당 초	변 경
준공기한(2차)	2017.09.13∼2018.06.30	2017.09.13∼2018.07.31
증 · 감	-	증 1 개월
공사금액	521,065,000원	521,065,000원

※ 붙임 : 공기연장요청 공문 및 사유서

나. 준공기한 연장 신청 사유

1. 자전거정책과 자전거도로 추가보완 요구

➀ 자전거도로 규제심의 결과 반영(서울지방경찰청 협의 사항)

- 관련부서 : 서울지방경찰청, 서울시 자전거정책과

- 추가보완 내용 : 종로4가 자전거도로 횡단계획변경(셋벡공사) 등

➁ 관련문서

❒ 도기시반시설본부-18-6515(2018.06.25) : 종로 자전거도로 안전시설 추가보완 작업지시

❒ 관련문서 : 자전거정책과-6323(2018.06.22) : 종로 자전거도로 안전시설 추가보완

2. 시설물관리 부서 보완

➀ 시설물 인수인계를 위한 조치결과 제출 요청

- 관련부서 : 종로구청 도로과, 북부도로사업소 보수과

❒ 도로과-8309(2018.05.30) : 현장점검 결과통보 및 조치요청

❒ 도로보수과-4944(2018.06.12) : 종로BRT 준공전 합동점검 결과 적출사항 조치요청

□ 검토결과

- 서울시 자전거정책과로부터 서울지방경찰청과 협의 완료된 종로4가 횡단계획 변경사항 등 추가공사 요청

- 시설물관리 부서 보완 요구(종로구청 도로과, 북부도로사업소 보수과) 및 조치 기한을

고려하여 공사기한을 7월말로 1달 연장하는 것은 타당한 것으로 사료됨.

밤고개로 확장공사외1 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술자  강  종  빈