건설사업관리기술자 검토의견서

기술검토 건 명	건설폐기물 처리 용역 준공기한 연장(3차) 검토
공 사 명	종로 중앙버스전용차로 설치공사	검 토 자	정 해 성
검토기간	2018. 07. 23
근거공문	도성2018-3447호

□ 개   요

◉ 건설사업관리 업무지침서 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 4. 설계변경,       공기연장 등 주요사항 발생시 발주청으로부터 검토․지시가 있을 경우 현지       확인 및 검토․보고

나. 관련문서

❒ 도기시반시설본부-18-6515(2018.06.25) : 종로 자전거도로 안전시설 추가보완 작업지시

❒ 관련문서 : 자전거정책과-6323(2018.06.22) : 종로 자전거도로 안전시설 추가보완

❒ 도로과-8309(2018.05.30) : 현장점검 결과통보 및 조치요청

❒ 도로보수과-4944(2018.06.12) : 종로BRT 준공전 합동점검 결과 적출사항 조치요청

□ 건설계기물 처리용역 준공기한(3차) 연장 검토내용

가. 준공기한(3차) 연장

1. 건설폐기물 처리용역

구 분	당 초	변 경
준공기한(2차)	2017.09.13∼2018.07.31	2017.09.13∼2018.08.15
증 · 감	-	증 0.5 개월
공사금액	521,065,000원	521,065,000원

※ 붙임 : 공기연장요청 공문 및 사유서

□ 검토결과

- 건설폐기물 처리용역 준공기한(3차) 연장사유를 검토한 결과, 시공사의 준공기한(‘18년 07월 말)을❲준공서류 작정지연❳ 고려하여 8월 15일까지 공사기한을 0.5달 연기하는 것은 적정한 것으로 사료됨

밤고개로 확장공사외1 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술자  강  종  빈