과 장				팀 장		심사자		설계자			설 계		심 사		결 재
											2014년 7월 일		2014년 7월 일
설 계 서(변 경)
	공사명 : 2014년 노면표시 유지보수공사(연가단가)-설계변경(1차)
	구 분					금 액								비 고
						당 초			변 경			증 ․ 감
	총 공 사 비					668,807,370			668,807,370			-
	공사비		공 급 가 액			297,666,700			297,666,700			-
			부 가 가 치 세			29,766,670			29,766,670			-
			계			327,433,370			327,433,370			-
	관 급 자 재 비					332,270,000			332,270,000			-
	이 전 비					9,104,000			9,104,000			-
□ 공사개요 - 차 선 도 색 : 170,500m → 157,503m - 차 선 제 거 : 8,000m → 12,457m - 표지병 설치 : 420개 → 160개 - 표지병 제거 : 200개 → 200개