공 사 설 명 서

1. 목    적

가. 대기측정망 시설 보수공사 계획(2014)-대기부1890호(2014.2.24.)

나. 2014년도 대기측정망 운영·관리계획-기후대기과 2148호(2014.2.10.)

위 근거에 의거 영등포측정소 노후시설 보수 및 환경개선 공사를 시행하여 대기측정망의 원활한 관리·운영에 만전을 기하고자 함.

2. 공사 개요

○ 공 사 명 : 영등포측정소 환경개선 공사

○위  치 : 서울시 영등포구 양산로23길 11(당산1동 주민센터 옥상) ○ 공사내용 : 가설 및 철거공사, 천정공사, 벽체공사, 바닥공사, 외부공사 등.

3. 계약방법 : 수의계약

4. 준공기한 : 착공일로부터 25일

5. 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 1년간

6. 예정공정표

공 기(일) 공 종	착공일로부터(일)
	3	6	12	18	24	25
현장 확인 및 자재준비
보수 및 개선 공사
현장 정리 및 청소

공 사 지 침 서

1. 일반사항

가. 공사개요

1) 적용범위

- 본 지침서는 보건환경연구원에서 발주하는 영등포측정소 환경개선 공사에 대하여 적용한다.

2) 공사의 주요 목적물

- 영등포측정소 : 강화마루 및 데코타일 공사, 외부벽체 도장공사

천정마이텍스공사, 내부벽체 무늬코트공사, 하이샤시 창호공사 등.

3) 적용순서

- 설계서 간에 상호 모순이 있을 경우 공사설명서, 공사지침서, 설계서,

물량내역서 순으로 적용한다.

- 지침서 본문의 관련법규 및 KS규정 등은 최신법규 및 규정을 적용한다.

나. 용어의 정의

1) 설계서

지방자치단체공사계약일반조건 제1절 2 “라” 설계서를 말한다.

2) 발주자

건설산업기본법 제2조 제10호의 발주자를 말한다.

3) 공사감독자

지방자치단체공사계약일반조건 제1절 2 “다”의 공사감독관을 말한다.

4) 계약담당자

지방자치단체공사계약일반조건 제1절 2 “가” 및 지방계약법 시행규칙 제2조 규정에 의한 자.

5) 계약상대자(수급인)

지방자치단체공사계약일반조건 제1절 2 “나” 지자체와 공사계약을 체결한 자.

6) 현장대리인

지방자치단체공사계약일반조건 제5절 4 “가” 관계법령에 의하여 기술자로 인정하고 있는 자.

7) 하자

하자라 함은 당 공사와 관련하여 공사지침서, 설계서(내역서) 등에서 요구되는 시공 상태나 품질이 결여되어 있는 것을 말한다.

다. 법령준수

수급인은 본 지침서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우에는 대한민국의 관련법규 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

라. 수급인의 책무

1) 설계서 검토

㉮ 수급인은 공사 착수전에 설계서를 면밀히 검토하고, 설계상의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치를 취하여야 한다.

㉯ 수급인은 설계서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

- 하자 발생이 우려되는 경우

- 발주자가 승인한 설계변경 사유가 있을 경우

2) 설계서변경 및 공사기한 연기

지방자치단체공사계약일반조건 제6절~제8절 규정에 따라, 설계변경 또는 계약기간(공사기한)연장사유가 발생하였을 경우, 발주자와 협의하여 정한다.

마. 공사수행 및 책임한계

1) 공사수행

㉮ 공사 수급인은 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 계약문서에 근거한 발주자의 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 발주자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

㉯ 수급인은 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

㉰ 공사감독자는 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

㉱ 수급인은 건설공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주자의 특별한 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

㉲ 수급인은 공사를 일시 정지한 경우에는 공사중단으로 인하여 공사목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사중단부분, 공사물 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

2) 책임 한계

㉮ 수급인은 현장대리인 등 수급인이 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 수급인과 납품계약을 체결한 자의 해당 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

㉯ 수급인은 공사감독자가 서면으로 공사를 인수하기 전까지 공사구간을 보호하여야 한다. 수급인은 공사중 또는 공사중이 아닐지라도 재해 또는 기타 원인에 의해 그 공사의 모든 부분에 손상이 없도록 필요한 예방조치를 강구하여야 한다.

㉰ 수급인은 그 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구, 보수 완료하여야 한다. 이에 소요된 비용은 수급인의 태만이나 과실이 없는 경우(예를 들어 지진, 해일, 태풍이나 기타 천재지변과 같이 예견하거나 대처할 수 없는 불가항력적인 경우나 전쟁이나 적에 의한 경우 또는 발주자의 귀책사유에 의한 경우)를 제외하고는 수급인이 부담하여야 한다.

㉱ 수급인은 수급인이 보관하고 있는 지급자재 및 관유물을 분실 또는 손괴한 때에 발주자가 정한 기한 내에 변상 또는 원상복구하여야 한다.

㉲ 수급인은 공기가 연장되는 경우에도 공사구간을 관리할 책임이 있으며, 적절한 배수처리 등 공사구간에서의 피해를 방지하기 위한 필요한 예방조치를 취하여야 한다.

㉳ 수급인이 발주자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

바. 현장 안전관리 및 정리

공사 수급인은 공사시행에 있어 항상 규정된 안전수칙에 따라 안전관리를 하여야하고, 작업 중 부주의로 인해 각종 안전사고 발생시 수급인은 민․형사상 책임을 져야 한다.

1) 공사 수급인은 착공시부터 준공시까지 현장대리인을 두어야 한다.

2) 현장대리인은 현장에 상주하여 감독원의 지시에 따라야 하며, 시공자를 대표하여 시공 재해예방, 작업원의 통제 및 사용자재의 관리, 반․출입 등 제반 이행 사항에 대하여 책임을 지고 처리한다.

3) 수급인은  공사시행 중 현장의 안전, 보안, 노무관리 및 사용자재 등을 철저히 관리하여 기존 및 제3의 설비에 대하여 손상과 피해가 발생하지 않도록 하여야 하며, 손상 및 피해발생시 원상복구는 물론 현물변제 및 배상을 하여야 한다.

4) 시공완료 후 가설물의 철거 및 원상복구는 물론 뒷정리를 철저히 하여야 하며, 쓰레기 및 폐자재는 전량외부로 반출하여 관련법규에 의하여 적법하게 처리하여야 하며, 재사용이 가능한 자재류는 감독원의 자시에 따라 처리하여야 한다.

2. 공사 재료 및 시공

가. 재료

1) 물품의 규격 및 치수는 계약상 명시된 규격명세 및 발주자가 제시한 견품의 규격 및 치수에 맞는 것으로 설치하여야 한다.

2) K.S 규격으로 설치하여야하며, K.S 품이 없을 시에는 동등이상의 시중제품 중 최상품으로 설치하여야 한다.

3) 사용자재는 사전 규격 및 물품의 상태를 먼저 발주자에게 확인하고 설치물품의 품명 및 규격에 대하여 상세히 명시되지 않았거나 계약자와 발주자 사이에 이견이 있을 시에는 발주자의 해석에 따른다.

나. 시공

1) 대기측정소 공사로 인한 측정소 장비 운영의 공백을 최소화 할 수 있도록 감독관과 긴밀히 협조하여 시공할 것.

2) 측정 장비의 손상이 없도록 공사 자재의 관리에 철저를 기해줄 것.

다. 공사 적용 범위

▣현장 공사전 도면

∎ 9450mm(세로) * 6600mm(가로) * 2400mm(높이)

▣  현장 공사후 도면

∎ 9450mm(세로) * 6600mm(가로) * 2400mm(높이)

▣  서울의 색채 제안서

1) 가설공사

㉮ 현장 보양작업을 실시한다.

㉯ 외부 비닐사이딩 시공전 벽체에 먹메김을 한다.

㉰ 자재운반은 장비를 이용하여 최대한 안전하게 운반하도록 한다.

㉱ 공사가 완료되면 모든 자재와 폐기물은 깨끗이 치우고 준공청소를 한다.

2) 철거공사

㉮ 철거 전 위험물을 먼저 확인하고 안전하게 철거 작업을 진행한다.

㉯ 모든 철거작업시 기계의 미세먼지부분이 손상되지 않도록 보양 작업              을 꼼꼼히 챙겨 하며, 외부환경으로부터 보호도 겸해 기초작업 실시한다.

㉯ 천정아미텍스 철거시 기존 기계장비가 손상되지 않도록 주의를 기울              인다. 기존틀을 재활용해야 하므로 손상에 주의를 기울여 철거한다.

㉰ 기계실문틀철거 하되 문틀은 벽체손상을 최대한 주지 않는 범위내에              서 안전하게 철거한다.

㉰ 철거 폐기물은 바로 처리하도록 한다.

3) 내부공사

㉮ 경량철골 천정틀, 천정재(아미텍스) 보수, 매입형광등 교체

㉯ 아미텍스 부분 철거 후 파손 경량틀 및 m-bar설치하고 부분 교체한다.

㉰ 아미텍스 교체 한후 전체 7개 전등 철반사로 교체.

㉱ 기계를 조심하고 그위에 보양처리를 한다.

4) 벽체공사

㉮ 한쪽벽면에 각재를 걸고 석고보드 설치한다.

㉯ 석고보드 설치함에 있어 창문의 두께를 염두에 두고 가설을 세운다.

㉰ 하이샤시 창호 설치: 1200*1200 1세트, 600*600 1세트, 외부불투명              16mm 페어글라스, 내부 5mm유리 장착설치 이중 방음창으로 한다.

㉱ 기계실 문 : abs도어문으로 설치하되 사무실에 맞는 문을 설치한다.

㉲ 석고보드 전부 설치한후 보양을 재차확인하고  1차 수성페인트 도장

㉳ 2차 무늬코드 뿜칠로 도장,  3차 코팅제를 마지막으로 내부 도장공사              마무리 한다.

5) 바닥공사

㉮ 강화마루 수평잡아 설치한다.

㉯ 나머지 부분 데코타일 3mm설치한다.

㉰ 번호키박스와 함께 설치 한다.

6) 외부공사

㉮ 플라스터, 모르타르, 비닐사이딩면의 바탕만들기

건축물의 비닐사이딩면은 시공 초기에 플라스틱과 알칼리성을 함유하       고 있어, 도막의 변색이나 박리 등을 일으킬 수 있으므로 도장하기 전       에 충분히 건조시켜야 한다.

① 공 정

플라스터,비닐사이딩면의 바탕만들기 공정은 면의 처리, 건조 시간      및 도료량에 따라 다음 표를 기준으로 한다.

<표> 비닐사이딩면, 석고 보드면 전면(Allputty) 바탕만들기(2종)

공 정		내 용	면 처 리	건조시간	도료량 (㎏/㎡)
1	바탕처리		바탕면의 들뜸이나 부풀음이 없나 조사
2	오물, 부착물제거		오물, 부착물제거
3	프라이머	아크릴 에멀션 투명도료1：물4		2시간	0.15
4	퍼티	아크릴 에멀션 퍼티 도는 짚섬퍼티		24시간	1
5	갈기작업

<표> 비닐사이딩 이음새 바탕만들기(3종)

공 정		내 용	면 처 리	건조시간	도료량 (㎏/㎡)
1	바탕처리		바탕면 들뜸이나 부풀음이 없나 조사	28일 이상
2	오염, 부착물 제거		오물, 부착물제거
3	프라이머	아크릴 에멀션 투명도료 1: 물4		24시간	0.15
4	이음새 퍼티	아크릴 에멀션 투명도료 1: 물4	F80～120 연마지 닦기		1
5	이음새 테이프 부착	양면 접착테이프
6	줄퍼티(테이프면)	아크릴에멀션 퍼티 또는 석고퍼티		2시간	0.5
7	갈기작업		F240 연마 혹은 물샌딩(F320)

주 : 1. 비닐사이딩면의 바탕처리는  시방에 의거, 담당원 지시에 따라 별도 처리 계산한다.

2. PVC면의 전면 면처리도 감독원 지시에 따라 별도 처리한다.

다만, 비닐계 도료, 합성수지 에멀션 페인트 도장일 때에는 바탕의 건조시간을 3주간(21일)양생한다.

② 공 법

* 오염, 부착물의 제거는 바탕을 손상하지 않도록 주의한다.

* 바탕의 균열, 구멍 등의 주위는 물축임을 한 다음 석고퍼티로 땜질            한다. 건조 후 연마지로 평면을 평활하게 닦는다.

* 무광택 도료로서 특수도장을 잘 받아 들일 수 있게 할 때는 바탕            표면을 도료의 성질에 따라 거칠게 한다.

* 특수도장을 하기로 예정된 콘크리트 바닥면은 5%의 염산용액, 혹             은 기타 청소 전용의 용제로 씻어내고 물로 다시 씻어낸 후 암모             니아 등 린스(rinse)로 중화시킨다. 또는 샌드 블라스트 공법을 사             용할 수 있다.

㉯ 유성 페인트 도장(합성수지 조합페인트 도장)

유성 페인트 도장의 도장 종별, 도장 횟수는 공사시방서에서 정한 바      가 없을 때는 다음과 같이 시공한다.

① 철부도장

철부의 유성페인트 도장의 공정, 도료, 희석비율, 면처리, 건조시간          및 도료량은 표에 따른다.

<표> 철부 유성페인트 도장 공정

공 정		내 용	희석비율 (질량비)	면 처 리	건 조 시 간	도료량 (㎏/㎡)
1	바탕조정	연마지 F120	-	16.2 의거
2	녹막이도장 (1회)	에칭 프라이머 (KS M 5337)	100		12시간	0.09
			신너 0～10
3	녹막이도장 (2회)	아연말 프라이머 (KS M 5325)	100		48시간	0.1
			신너 0～10
4	재벌도장	유성페인트 (KS M 6020)	100	16.1.3 의거	12시간	0.12
			신너 0～10
5	연마	연마지 F180～240으로 가볍게 연마
6	정벌도장	유성페인트 (KS M 6020)	100		12시간	0.1
			신너 0～10

② 주의사항

* 유성페인트의 조색

정벌도장에 쓰는 유성페인트는 전문 제조회사가 소요의 색상과 광택으로 조합함을 원칙으로 한다. 도장업자가 조색할 때에는 담당원의 승인을 받아 작업한다.

* 사용하기 전에 균일상태로 잘 혼합, 섞은 후 사용한다.

* 도장할 바탕은 기름, 먼지, 녹, 기타 오염물을 완전히 제거한 후        도장한다.

* 희석은 해당 신너로 10～20% 정도 희석하여 사용한다.

* 목재에 도장할 때는 KS M 5318(조합페인트 목재용 백색 및 담        색)을 사용하고, 철재를 도장할 때는 KS M 6030 (방청도료)을 이       용하며, 하도가 완전히 건조된 후 상도로 사용한다.

* 오래된 구도막 위에 다시 도장할 경우는 구도막을 F320～400 샌       드페이프로 연마한 후 도장한다.

* 도료는 사용 후 완전히 밀폐하여 화기로부터 멀리한다.

* 재도장 간격을 준수하여 얇게 도장한다.

라. 공사보고

본 공사 시공 진행에 대한 진척사항을 감독원의 요청 및 지시가 있을 경우 시공 일보 등의 공사 진행보고서를 작성 제출하여야 한다.

마. 준공완료

준공 시 제출서류 : 공사의 시행 전․후 사진 2부

바. 기타

수급인은 본 계약에 의한 공사 시행시 다른 사람의 특허권을 사용할 경우에는 수급인이 모든 책임을 지고 특허관련 제반사항을 원활히 처리하여야 한다.