공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2017년 보도유지 보수공사(연간단가) 2차

2. 위    치 : 강남구 관내 전지역

3. 사업목적

- 본 공사는 강남구 관내 상태가 불량한 간선보도를 신속히 정비하여 주민들이 안전하고 편하게 통행할 수 있는 보행환경조성을 위해 시행하는 공사임

- 본 공사에 참여하는 업체는 첨부된“보도블록10계명 이행 서약서”를 계약 체결 시 발주기관에 제출하여 상호계약을 체결하여야 하고 시공계획서 제출 시 참여기술자(기능공 포함) 인적사항을 함께 제출하고 보도공사는 보도포장 전문기술 교육과정을 이수한 기능인력을 활용하여야 함

4. 공사개요

- 투수블록포장 A=50a

- 경계석(도로,보차도) 설치 L=250m

- 측구설치 L=200m

5. 공사기간 : 착공일로부터 2017년 12월 31일까지

(본 공사기간에는 국,공휴일, 임시공휴일, 강우일, 동절기 등 작업불가 일수가  포함된 공기임)

- 아래의 경우에 발주청의 승인을 득하여 공사기간을 연장할 수 있다.

1) 공사계약일반조건 제32조에서 규정한 불가항력의 사유에 의한 경우

2) 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단 되었을 경우

3) 계약상대자의 부도 등으로 연대보증인이 보증시공을 할 경우

4) 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증시공 할 경우

5) 설계변경 등으로 인하여 준공기한 내에 계약을 이행할 수 없을 경우

6) 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

6. 공사금액 : 총공사비 790,965,000원

- 도급비 502,161천원, 관급비 240,886천원, 이전비 47,918천원

7. 하자검사기간 : 준공일로부터 2년으로 한다.

8. 설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경을 할 수 있다.

1) 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순되는 점이 있을 경우

2) 발주기관의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단 되었을 경우

3) 새로운 기술, 공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우

4) 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

9. 보도블록10계명 이행 서약서 제출

- 본 공사에 참여하는 업체는 공사의 품질수준 향상을 위하여 설계서 및 시공상세도 등 시공기준을 준수하여 정밀시공을 이행할 것과 시민의 안전대책에만전을 기할 것을 서약하고, 이를 준수하지 않을 경우 부실구간 전면 재시공및 입찰참가제한 등 발주기관의 조치에 동의하는 별첨“서약서”를 계약체결 시 발주기관에 첨부하여 상호계약을 체결해야 함

10. 참여기술자(기능공 포함) 명단 체출

- 본 공사에 참여하는 업체는 공사착수전에 시공계획서 제출시 시공에 참여하는 참여기술자(기능공 포함) 명단을 함께 제출하고 보도공사는 보도포장 전문기술 교육과정을 이수한 기능인력을 활용하여야 함

11. 기타 유의사항

1) 본 공사는 계약수량(금액)은 추정물량이므로 수량의 증․감이 발생하여도 이의를 제기 할 수 없다.

2) 기준환율 : 1US ＄당 1,208.5원 (2017.01.02.)

3) 자재단가 : 2017년 물가자료, 물가정보, 거래가격, G2B 조사자료 중에서 최저단가 적용

4) 노임단가 : 대한건설협회에서 시장조사한 2017 상반기 노임단가 적용

5) 폐기물관리 : 공사시행 시 발생하는 폐기물의 상차 운반의 투명성을 확보하기 위한 근거자료(일자,차량번호,물량,사진 등)를 작성·비치하여야 함

6) 발생토사관리 : 현장에서 발생하는 양질의 토사는 서울시 사이버 흙은행(Http://soilbank.seoul.go.kr)시스템에 등록하여 상호 이용이 가능하도록 조치하여야 함

별 첨 : 보도블록10계명 이행 서약서 부.  끝.

보도블록 10계명 이행 서약서

서울특별시 강남구에서 시행하는 2017년 보도 유지보수공사(보도정비 및 굴착복구공사 등 보도블록공사를 수반하는 모든 공사 포함)를 수행함에 있어, 보도블록 시공 수준향상과 시민보행불편 해소를 위하여 당사(하도급업체 포함)의 현장대리인과 모든 참여기술자를 대표하여

1. 설계도서 등 각종 계약문서와 관련 규정(시방서 등)을 준수하여 시공상세도 등에 의거 정밀하게 시공하고, 보행자 안전 및 불편방지대책을 수립하여 시행에 만전을 기할 것이며, 특히, 아래 내용을 반드시 준수하여 공사 품질확보에 최선을 다할 것을 서약합니다.

<부실공사 방지 방안>

① 보도 포장면의 평탄성은 10mm이내 (폭 3m 기준)

② 보도 횡단 기울기는 2%이내

(부득이하여 발주 청이 승인한 경우 4%)

③ 블록 간 줄눈 간격은 2~3mm 이내

④ 블록 간 단차 및 경계석과 블록 간 단차는 2mm이내

⑤ 보도블록 가공 시 망치 사용을 금지하고 자동절단기 등 절단기를 사용 정밀하게 가공하고, 절단 부산물로 인한 분진 방지를 위한 비산먼지 방지 시설(분진흡입기 등)을  현장 내 설치 운영하여 환경오염 방지

⑥ 보도 상 시설물(맨홀 등)  주변과 보도 턱 낮춤은 ‘시공 상세도’를 작성하고, ‘서울특별시 보도공사 설계시공 매뉴얼’을 준수 정밀하게 시공

⑦ 모든 보도공사는 ‘서울특별시 전문시방서(토목편)’ 등 제시방서와 ‘보도공사 설계시공 매뉴얼’준수 시공

⑧ 공사 착수 시 ‘보도포장 전문기술교육 과정’을 이수한 기능 인력 배치

⑨ 관련규정에 의한 품질시험과 품질관리제 이행

⑩ 보도공사실명제 이행

⑪ 보도공사 Closing 11 준수

⑫ 원스트라이크 아웃제 이행

<보행자 안전 및 보행권 확보>

① 임시보행로 확보 및 보행안전도우미 배치

(보행안전도우미 교육과정 이수자를 배치하고, 현장에서는 항상 교육이수증 패용)

② 공사장 내 공사자재 및 주변 정리정돈 철저

③ 공사장 시․종점부 공사안내표지판 등 안내시설과 안전펜스 등 안전시설 설치하여 보행자 안전 확보

④ 공사장내 공사참여자는 안전장비 상시 착용

(안전모, 안전조끼, 안전화 등)

2. 부실공사(하자책임기간 중 부실공사로 인한 하자 포함)가 발생한 경우 발주처 지시에 따라 해당구간은 전면 재시공하고, 관련규정에 의거 입찰참가제한 등 발주기관의 제재조치를 받겠으며,  공사장 관리 소홀로 시민불편이 발생하지 않도록 현장 관리에 만전을 기하고 성실하게  공사를 완료할 것을 서약합니다.

위 서약서는 계약상대자로 결정될시 본 서약서를 계약서에 포함하여 계약하고, 반드시 이행할 것이며, 본 공사 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리할 것을 서약합니다.

.     .     .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (인)