공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 1정수장 여과지 역세척배관 교체공사

2. 공사목적

노후 및 부식이 심한 도복장 강관을 적기에 무 단수공법 등의 시공으로 물 생산 중단 없이 최적의 설비로 개선하고자함.

3. 공사개요

1정수장 1계열여과지 8지 및 4계열여과지 16지 역세척배관 교체

4. 공사기간 : 착공일로부터 120일

5. 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 3년

6. 특기사항

○ 공사가 난해하므로 현장 파악 후 입찰에 응하고, 계약자는 무 단수공법, 배관교체 시공방법        등을 강구, 발주기관과 사전 협의한 후 제작도면을 작성 14일 이내에 제출하여야 한다

○ 계약자는 무 단수공법 등을 강구 시행하여야하며, 어떠한 경우에도 수질이 악화       되거나 공사 중 수돗물생산에 지장이 없도록 조치 시공 하여야 함.

7. 예정공정표

공 정 별	예정공정(착공일로부터)			비고
	1~30일	31~110일	111~ 120일
작업준비 (자재제작등)
설치작업 및 부대공사
시운전 및 준공처리