공 사 설 명 서

○ 공 사 명 : 2020년 포장공사구간 노면표시 설치공사(B구역)

○ 목   적 : 본 공사는 사업소 관내 포장공사(2020년 노후포장도로 정비공사(B구역), 굴착복구공사)구간의 노면표시를 신속히 설치하여 도로를 이용하는 시민생활의 불편 및 안전사고를 예방함으로써 쾌적하고 안전한 도시환경을 조성하고자 함.

○ 공사위치

- 남부도로사업소 관내(영등포구 일부, 금천구, 동작구, 관악구, 서초구) 포장구간

○ 공사개요

- 차선도색 186,570m

○ 공사기간

- 본 공사의 공기는 착공일로부터 2020년 12월 11일까지

- 시방기준에 맞게 구간별 공사를 신속히 시행하여야 하면, 아래의 경우 시행청의 승인을 얻어 공사기간을 연장할 수 있다

○. 공사계약일반조건 제26조 제1항에 따른 공사기간 연장을 청구할 경우

○. 천재지변 및 불가항력 등으로 작업이 불가능할 경우

○. 발주기관의 책임으로 착공이 지연되었거나 시공이 중단되었을 경우

○. 수급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능할 경우

○ 하자기간 : 준공검사일로부터 1년간

○ 예정 공정표

일 정 공 종	수량	공 사 기 간 (착공일로부터 1년)									비고
		'20. 3월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
착공준비	1식
특수노면표시 도색공	1식
특수노면표시 재도색공	1식
공정율(%)	1식	15	15	15	10	10	10	10	10	5
누계공정율(%)	1식	15	30	45	55	65	75	85	95	100